109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 시에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
성암매립장 최종복토 공사	4,010	0	96	3,914	2018	2017	10
전선지중화 사업	15,100	3,600	6,400	5,100	2019	2017	50
울산 안전체험관 건립	32,000	7,590	11,922	12,488	2018	2017	95
그린자동차 부품실용화 및 실증지원	36,700	4,900	9,325	22,475	2020년	2017	39
조선해양기자재 장수명 기술지원센터 구축	38,775	17,848	11,339	9,588	2020	2015	75
분리막 소재평가 표준화 및 공정실증화 기반구축	11,500	1,425	1,465	8,610	2021	2016	30
뿌리산업 ACE기술지원센터 건립	21,289	18,657	2,632	-	2018	2013	90
고효율 차량경량화 부품소재 개발	20,000	9,700	4,900	5,400	2020	2015	82
나노융합산업 기반확산사업	3,251	1,442	911	898	2019	2015	70
석유화학공정기술교육센터 구축	25,200	10,097	7,700	7,700	2019	2015	70
차세대 조선에너지 부품분야 3D프린팅 제조공정연구센터 구축	230,000	-	2,900	201,000	2021년	2017년	30
그린에너지 소재기술 개발센터 구축	22,475	16,998	3,088	2,389	2019	2014	80
친환경 전지융합 실증화 단지 조성	39,412	20,694	11,725	6,994	2019	2014	76
산단내 에너지신산업 활성화를 위한 ESS보급	13,200	-	13,200	-	-	2017	100
울산시립미술관 건립	70,867	17,730	3,419	49,718	2020년	2014년	설계완료
어린이테마파크 건립	11,495	1,634	8,906	955	2018년	2015년	100
전국무용제 개최	400		400		2017	2016년	100
울산대공원 장미원 빛축제	2,000	500	500	1,000	계속	2016	매년시행
울산수목원 조성	25,500		11,454	14,046	2019	2017	10.2
물순환 선도도시 조성 저영향개발 시범사업	9,600	-	400	9,200	2019	2016	4.2
석유화학단지 완충저류시설 설치	32,920	-	693	32,227	2021	2016	2.1
십리대숲 생태관광센터	3,100	-	174	2,926	2018	2016	5.6
울산전시컨벤션센터 건립	167,800	18,245	28,070	121,485	2020년	2015년, 2017년	10
안전하고 품격있는 상징도로 조성	13,100	3,000		10,100	2018	2017	80
화봉제1공원 공영주차장 조성사업	70		2,000	5,000	2019	2017	10
청사 증축공사	30,000	5,990	17,650	6,360	2018	2016	80
울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비	34,700	-	1,395	35,305	2019	2017	설계 중
효문공단 내부도로 개설공사	11,500	1,053	5,995	4,452	2019	2017	27%
노동복지센터건립	7,002		270	6,732	2019	2017	33%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

성암매립장 최종복토 공사

담당자

자원순환과 윤길용(☎229-6113)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 1월, 사실상 사용하지 않고 있는 성암매립장 사용종료 신고를
위하여 최종복토 공사 시행

○ 매립 종료된 매립장의 효율적 관리 및 토지 활용성 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2019. 2

○ 위 치 : 남구 성암동 150-1

○ 규 모 : 최종복토 71,820㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,010백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,010		96	3,914
국 비
시 도 비	4,010		96	3,914
시군구비

□ 추진상황

○ 현재 공정률 10% : 현황측량 및 부지정리

- 표토제거, 흙쌓기(V=11,505㎥)

□ 향후계획

○ 공정 추진 : ~ 2019. 2.

- 가스 포집관 설치 L=2,366m

- 차단층 : 벤토나이트 포설 및 다짐 21,189㎥

- 식생대층 : 흙쌓기 40,843㎥

- 배수층 : 잡석부설 19,170㎥

○ 사용종료 신청

- 2018.  9.  : 사용종료 검사(한국환경공단)

- 2018. 10.  : 사용종료 신고(낙동강유역환경청)

사업명

전선지중화 사업

담당자

건설도로과 박명환 (☎229-4095)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시가지 간선도로변 무질서하게 설치된 전주 및 통신선로를 지중화하여

보행환경 개선 및 쾌적한 가로환경 조성코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼산로(터미널사거리~태화강역), 돋질로(시청~봉월사거리)
화합로(중구청~복산사거리)

○ 규 모 : 전선(전기‧통신 가공선로) 지중이설 : L=3.64 ㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	15,100	3,600	6,400	5,100
국 비
시 도 비	7,600	1,800	3,200	2,600
시군구비
지 방 채
민간자본	7,500	1,800	3,200	2,500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 삼산로, 돋질로 : 공사착공(‘18.6. ~ ’18.12.)

○ 화합로 : 실시설계 중

□ 향후계획

○ 삼산로, 봉월로 : ‘18.12. 준공예정

○ 화합로 : 실시설계(‘18.12.까지), 공사시행(’19.1.~‘19.10.)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

울산 안전체험관 건립

담당자

안전구조과 박근영(☎279-6582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 자율안전의식 제고를 위한 생활안전 교육을 위한 안전체험관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.1~2018.12 (4년간)

○ 위 치 : 울산광역시 북구 산하중앙2로 87-33 (정자동)

○ 규 모 : 연면적 7,610㎡, 지상3층/지하1층, 부지면적 108,984㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  32,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	32,000	6,924	8,429	16,647	0
국 비	10,000	0	1,000	9,000	0
시 도 비	22,000	6,924	7,429	7,647	0
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  95%)

○ 2018.6.15. 울산안전체험관 건축공사 완료

□ 향후계획

○ 2018.7.21.  울산안전체험관 전시체험시설 공사 완료

○ 2018.9월초 울산안전체험관 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

그린자동차 부품실용화 및 실증지원

담당자

산업진흥과 김수영(☎2862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연비규제 강화, 무공해차 의무판매 등 세계 자동차시장 변화에 대응

○ 장거리주행이 가능한 전기차 요소부품의 성능 및 효율향상과 통합시스템의 평가기술 개발로 글로벌 중소·중견기업 육성

□ 사업개요

○ 기간/주관 :  2016. 12 ~ 2020. 11(4년) / 울산테크노파크

○ 사업내용

- (부품R&D) 전기차 주행거리 확대를 위한 부품 성능 향상 기술개발

- (실증R&D) 중소기업 개발 전기차 부품평가, 차량 및 충전인프라 보급/실증

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,700백만원(국 19,900 시 7,000 민자 98)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,700	4,900	9,325	10,000	12,475
국 비	19,900	3,000	4,825	4,800	7,275
시 도 비	7,000	700	2,100	2,100	2,100
시군구비
지 방 채
민간자본	9,800	1,200	2,400	3,100	3,100
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

○ ‘16년(1차년) : 실증R&D(시험평가 기술개발3, 실증차제작2, 충전인프라 구축2),부품R&D 4건

○ ‘17년(2차년) : 실증R&D(시험평가 기술개발3, 실증차제작10, 충전인프라 구축8),부품R&D 4건

□ 향후계획

○ ‘18년. 10. ~ ’20. 11. : 3~5차년도 실증과제 수행 및 사업추진

사업명

조선해양기자재 장수명 기술지원센터 구축

담당자

산업진흥과 채수안(☎229-3832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제해사기구의 규제 강화에 따른 조선해양기자재 신뢰성‧장수명 기술 지원체계 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 12. ~ 2020. 12. (5년)

○ 사업내용

- 조선해양기자재 수명예측, 보수, 표준화 등을 위한 시험 인증체계 및 장비 구축, 센터 건립

○ 사업주관/규모 : 한국조선해양기자재연구원/건물 4,737.88㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 38,775백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	38,775	17,740	11,447	4,862	4,726
국 비	23,400	6,898	6,914	4,862	4,726
시 도 비	11,292	9,892	1,400
시군구비
지 방 채
민간자본	4,083	950	3,133
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ '15. 12. : 사업협약 체결

○ ‘16.  2. : 장비구축 착수 및 기본 및 실시설계

○ ‘17.  3. : 건축공사 착공

○ ‘18.  4. : 센터개소

○ ‘20. 12. : 센터구축 준공

□ 향후계획

○ ‘19. 3월 5차년도 장비구축

□ 사업변경 내역

○ 건축비 증액(민자 2,883백만원)

사업명

분리막 소재 평가 표준화 및 공정실증화 기반구축

담당자

산업진흥과 김명숙(☎229-2871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 분리막 소재 세계시장 및 국내시장의 확대 추세에 따라 국내 분리막 산업의 경쟁력 향상을 위한 국가차원의 전략적 지원체계 구축 필요

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 6. ~ 2020. 12. (55개월)

○ 사업내용 : 분리막 소재 모듈 및 시스템평가 표준화 및 실증화 기반구축

○ 사업주관 : 한국화학연구원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,500	1,425	1,465	1,073	7,537
국 비	8,000	1,000	1,040	673	5,287
시 도 비	1,500	225	225	153	750
시군구비
지 방 채
민간자본	2,000	200	200	247	1,500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ ‘17. 3. : 장비구축(3종) 및 실증화 부대시설 구축

○ ‘17. 12. : 장비구축 (3종)

○ ‘18. 1. : 2차년도 사업추진 (소재특성 및 성능평가 기반구축)

□ 향후계획

○ ‘18. 12. : 3차년도 사업추진(표면특성 측정 장비구축)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없 음

사업명

뿌리산업 ACE기술지원센터

담당자

산업진흥과 장석종(☎229-2872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자동차, 조선해양, 석유화학, 비철금속 등 정체된 주력산업의 경쟁력 강화를 위해서 지역 뿌리기업의 생산공정기술 혁신 필요

* 6대 뿌리기술 분야 : 주조, 용접, 금형, 소성가공, 표면처리, 열처리

○ ACE기술 지원기반 구축을 통해 뿌리기업의 생산공정 혁신과 원가경쟁력을 강화

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘13. 12. ~ ’18. 10(5년간)

○ 위    치 : 울산테크노일반산업단지 내

○ 사업규모 : 부지 9,918㎡, 건축연면적 2,583㎡  ※ 연구인력 15명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,289백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	21,289	18,657	2,632	-	-
국 비	10,647	8,015	2,632	-	-
시 도 비	10,647	10,642	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘13. 12월 ~ ’15. 7월 : 시제품 제작지원 장비구축(8종 14대)

○ ‘15. 2. 27. : 부지구입 완료

○ ‘15. 2월 ~ ’15. 12월 : 센터 구축 기본 및 실시설계 추진

○ ‘16. 3월 ~ ’17. 2월 : 센터 건립공사

○ ‘17. 3월 ~ ’18. 9월 : 장비 이설 및 구축

□ 향후계획

○ ‘17. 3월 ~ ’18. 10월 : 개원

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

고효율 차량경량화 부품소재 개발

담당자

산업진흥과 김명숙(☎229-2871)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산지역은 전국최대의 자동차 관련 생산단지로 차량용 경량 부품소재 고속 성형기술 개발 및 사업화 허브역할 수행

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. 7. ~ 2020. 6. (5년)

○ 사업내용

- 프라운호퍼 화학기술연구소 한국분원 설립

- 복합재료기술연구센터 및 장비구축, 기업지원

○ 사업주관/규모 : UNIST/건물 1,610.89㎡(지상 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	9,700	4,900	3,900	1,500
국 비	12,000	4,500	3,000	3,000	1,500
시 도 비	4,000	3,600	400
시군구비
지 방 채
민간자본	4,000	1,600	1,500	900
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 82%)

○ '16. 5. : 프라운호퍼 화학기술연구소 한국분원 설립 및 개소식

○ ‘16. 11. : 센터 착공 (’17. 6. 준공)

○ ‘15. 7. ~ : 장비구축(8종) 및 기업지원 추진

□ 향후계획

○ ‘18. 12. : 4차년도 사업추진(열가소성 프리프레그·테입 자동적층 시스템 구입)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없 음

사업명

나노융합산업 기반확산사업

담당자

산업진흥과 장석종(☎229-2872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 나노융합 시장은 연평균 21% 수준으로 성장

○ 자동차, 조선, 석유화학 산업의 고도화와 소재부품 산업의 경쟁력 확보를 위한 나노융합 기술혁신 및 제품화 전담기관 구축 시급

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘15. 11. ~ ’19. 10.(4년간)

○ 위    치 : 울산테크노파크 내

○ 사업규모 : 고기능성 나노코팅 상용화지원 기반구축(장비구축 11대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,289백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,251	1,442	911	898	-
국 비	2,100	1,300	400	400	-
시 도 비	900	100	456	344	-
민 자	251	42	55	154	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘14. 12월 : ‘15년 국비 3억원 반영

○ ‘15. 1월 ~ 10월 : 지방재정투자심사(‘15. 5월), 사업계획 중앙부처 협의

○ ‘15. 12월 ~     : 협약체결 및 사업추진

□ 향후계획

○ ‘18. 11월 : 4차년도 협약체결

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

석유화학공정기술교육센터 구축

담당자

산업진흥과 장석종(☎229-2872)

□ 사업목적 및 필요성

○ 석유화학 산업계의 최대 애로사항인 공정운전 전문인력 확보를 위한 “석유화학공정 전담교육기관” 국내 최초 설립

○ 석유화학공정 전문인력의 체계적인 양성을 통해 석유화학 공정 설비의 안정적 운전 및 미숙련으로 인한 안전사고 차단

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 5. ~ 2019. 4.(4년간)

○ 위    치 : 울산테크노산업단지 내

○ 사업규모 : 석유화학공정기술교육센터 구축(강의동 및 실습동 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,289백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	25,200	10,097	7,403	7,700	-
국 비	15,000	5,697	5,103	4,200	-
시 도 비	6,400	4,200	2,200	-	-
민 자	3,800	200	100	3,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘14. 3.  ~ ’14. 12. : 산업부 중기지방재정계획 등 반영, ‘15년 사업비 확보

○ ‘15.  1.  ~ ’15. 10. : 지방재정투자심사(‘15. 5.), 공유재산 관리계획 반영(‘15. 10.)

○ '15. 11. ~ '16. 4.  : 기본·실시설계

○ '16. 1.  ~ '16. 5. : 센터 건립 부지매입

○ '16. 6.  ~ '18. 4. : 센터 준공

□ 향후계획

○ 19. 4. : 장비구축 완료 및 개원

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

차세대 조선에너지부품분야 3D프린팅제조공정연구센터 구축

담당자

창조경제과 배희영(☎229-6471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트제조 핵심기술인 3D프린팅을 통해 조선‧에너지산업 고도화

○ 제조업 기반 도시 울산은 산업용 3D프린팅 테스트베드 구축 최적지

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5년간)

○ 위    치 : 울산테크노산단 28B 7-2

○ 규    모 : 부지 7,220㎡, 연면적 2,848㎡

○ 사업내용 : 센터 및 장비구축, 조선･에너지부품 생산공정 및 기술개발 실증 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	23,000		2,900	6,428	13,672
국 비	10,000		1,000	1,728	7,272
시 도 비	11,000		1,500	4,300	5,200
시군구비
지 방 채
민간자본	2,000		400	400	1,200
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘17. 4. ～ ’17. 12. : 1차년도 사업추진(장비구축, 부지매입 계약 등)

○ ‘18. 1. ～ ’18. 12. : 2차년도 사업추진(설계공모 및 실시설계, 건립, 기술 개발 지원 등)

□ 향후계획

○ ‘18. 10. : 연구센터 건립 착공

○ ‘19. 1.～’19. 12. : 3차년도 사업 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

그린에너지 소재기술 개발센터 구축

담당자

에너지산업과 조민현(☎229-6394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생 에너지저장 전원 및 전기자동차용 이차전지 산업의 울산지역

거점기관 육성을 통한 기술경쟁력 제고 및 산업 활성화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 6. ~ 2019. 5.(6년간)

○ 위 치 : UNIST 내(이차전지 R&D센터 111동)

○ 내 용 : 고용량/고출력 리튬이차전지* 연구개발 및 영상분석 장비구축

* 이차전지의 일종으로 방전과정에서 리튬이온이 음극에서 양극으로 이동하는 전지

* 이차전지의 4대 핵심소재(양극, 음극, 전해액, 분리막)중 고용량·고안정성·고속 충방전용 전지개발을 위해 양극‧음극소재 개발(휴대용 IT제품, 에너지저장장치) 등에 이용

○ 주관기관 : 울산과학기술원(UNIST)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,475백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,475	16,998	3,088	2,389	-
국 비	19,010	14,510	2,300	2,200	-
시 도 비	2,000	1,500	500	-	-
시군구비					-
지 방 채					-
민간자본	1,465	988	288	189	-
기 타					-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘13. 6.    : 신규과제 평가 및 사업 착수

○ ‘14. 1. ∼ : 연구개발(특허출연 31건, 특허등록 9건, 논문 37건), 장비구축(16종, 7,860백만원)

○ ‘15. 6.    : 1단계 2차년도 연차평가(사업계속)

○ ‘15. 7.    : 1단계 3차년도 협약체결

○ ‘16. 7.    : 1단계 사업결산(사업계속) 및 2단계 1차년도 협약 체결

○ ‘17. 7.    : 2단계 1차년도 사업정산 및 2차년도 협약체결

□ 향후계획

○ ‘18. 7.    : 2단계 2차년도 사업정산

○ ‘19. 6.    : 사업종결 및 평가

사업명

친환경 전지융합 실증화 단지 조성

담당자

에너지산업과 김성호(☎229-6483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 풍부한 수소이용 관련 기술융합이 용이한 전․후방 산업이 집적화 되어 있는 이점을 기반으로 수소에너지를 이용하여 신성장 동력 창출에 기여하고 전주기 수소연료전지 실증화단지 조성으로 수소산업 거점화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 11. ~ 2019. 11.(5년간)

○ 위 치 : 울산 테크노산업단지 내

○ 규 모 : 건물 3,923㎡, 부지 6,610㎡

○ 사업내용 : 수소연료전지 연구, 품질시험, 사업화가 가능한 전주기적 실증화 단지 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	39,412	20,694	11,725	6,994	-
국 비	19,512	10,594	4,594	4,324	-
시 도 비	15,600	7,800	6,100	1,700	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	4,300	2,300	1,030	9,700	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76%)

○ ‘13. 7.       : 울산지역 대선공약사업 반영

○ ‘14. 3.       : 울산지역 특화발전 프로젝트 선정

○ ‘15. 7.       : 기술개발사업 연구과제 선정(4개 분야)

○ ‘15. 8. ~ 12. : 실증화단지 조성 공사 기본 및 실시설계

○ ‘16. 7.       : 실증화단지 건축공사 착공

○ ‘17. 12.      : 실증화단지 공사 및 수소 배관공사 완공

○ ‘18. 4.       : 벤치마킹용 200Kw급 연료전지 시스템 설치 및 시운전

□ 향후계획

○ ‘18. 12.       : 기술개발사업 연구과제 완료

○ ‘19. 01. ~ 11. : 스택평가 장비 구축 및 수소연료전지 발전시스템 실증운영

사업명

산단내 에너지신산업 활성화를 위한 ESS보급 확대

담당자

에너지산업과 임문선(☎229-2831)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정부의 에너지신산업 진흥정책에 적극 부응하고 선도적 역할 수행을 통해 ESS산업 등의 전략적 육성 및 에너지신산업 허브도시로 도약코자 함

○ 국내 최대 산업단지를 보유한 울산의 에너지다소비 기업에 대대적인 에너지저장장치(ESS) 보급으로 전력 피크부하 및 블랙아웃 대응, 에너지 비용절감 등을 통하여 에너지 효율의 최적화 도모 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3. ～ 2018. 3.(1년)

○ 위 치 : 산업단지내 7개 사업장

- 롯데정밀화학, 태광산업, 한국제지, 한국프랜지, 시설관리공단, SNF코리아, 제일화성

○ 규 모 : 에너지저장장치(ESS) 20.4㎿h 설계 및 구축 및 ESS 통합

모니터링 시스템 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,200	-	13,200	-	-
국 비	2,430	-	2,430	-	-
시 도 비	2,430	-	2,430	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	8,340	-	8,340	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘16. 10 ~ ’17. 2 : 2017년 지역 에너지신산업 활성화 사업 준비

○ ‘17. 2. ~  17. 3 : 2017년 지역에너지신산업 공고 및 사업 확정

○ ‘17. 3 ~  ’18. 3 : 산단내 7개사업장 ESS설비 구축 및 완료

□ 향후계획

○ 산업부(한국에너지공단) , 우리시 사업내역 정산 실시

※ 한국에너지공단에서 회계사를 통한 사업정산 실시 중

사업명

울산시립미술관 건립

담당자

문화예술과 김성훈(☎229-3651)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 오랜 숙원 사업인 시립미술관을 건립함으로써, 문화적·예술적인 미래 도시로 발전을 위함

○ 울산시민의 긍지향상, 사회교육과 평생교육의 장이 될 문화시설 인프라 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 중구 북정동 1-3번지 외 5필지

○ 사업규모 : 부지면적 6,182㎡, 연면적 12,400㎡

○ 주요시설 : 전시실, 수장고, 다목적 홀, 자료실 등

○ 사업기간 : ’2012. ∼ ’2020.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 70,867백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	70,867	17,730	3,419	0	49,718
국 비	17,200	5,429	3,000		8,771
시 도 비	53,667	12,301	419		40,947

□ 추진상황(설계용역 중)

○ ’16. 7. : 시립미술관 건립부지 확정

○ ’18. 1. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ ’18. 4. : 공사발주

□ 향후계획

○ ‘18. 7. : 공사발주 중단 및 시민 공론화 추진

사업명

어린이테마파크 건립

담당자

문화예술과 이상훈(☎229-3741)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 문화와 산업을 대표하는 테마 캐릭터를 개발하고 가족단위 관람객과 유아 및 어린이가 체험하고 즐길 수 있는 테마파크 조성

○ 어린이가 좋아하는 만화 애니메이션 및 VR어트렉션을 테마로 한 차별화된 테마공원을 조성하여 문화 인프라 확충

□ 사업개요

○ 위    치 : 동구 등대로 80-163 일원(일산동 911-1 외 2필지)

○ 사업규모 : 부지면적 21,648㎡, 연면적 2,187㎡(지상23층)

○ 사업내용 : 놀이 및 체험시설, 애니메이션관람, VR체험프로그램 등

○ 사업기간 : ‘14. 7. ~ ’18. 4.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,495백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		2016년	2017년	2018년
계	11,495	1,634	8,906	955
국비	1,000	1,000	-	-
시 도 비	10,495	634	8,906	955

□ 추진상황(공정률 100%)

○ ‘15.  1. ~ 9. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ ‘15.  7.  9.   : 건립부지 결정(대왕암공원 내)

○ ‘15.  9. ~ 10. : 중기지방재정계획, 투자심사 반영

○ ‘16.  6. ~ ’17. 3. : 기본 및 실시설계용역 실시

○ ‘16. 10. 19.   : 공유재산관리계획 반영

○ ‘17.  2.  9. : 도시관리계획(대왕암공원조성계획)결정(변경) 및 지형도면 고시

○ ‘17.  4. 27.   : 건립공사 착공

○ ‘17.  4. 16.   : 건립공사 준공

사업명

제26회 전국무용제

담당자

문화예술과 김보미(☎229-3766)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산광역시 승격 20주년 및 울산 방문의 해를 기념하고, 울산시를 문화예술의 도시 이미지로 널리 알리는 계기를 마련

○ 전국단위 최고의 무용축제로서, 무용 예술인들의 창작의욕 고취 및 지역시민들의 예술향유 기회 확대

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 9. 14.(목) ～ 9. 23.(토) <10일간>

○ 장    소 : 울산문화예술회관 대공연장 및 야외특설무대

○ 참가단체 : 전국 16개 시․도 대표 무용단

○ 사 업 비 : 400백만원(시비 400)

○ 주요내용 : 개․폐막행사, 축하공연, 부대행사, 경연대회 및 시상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		2016년	2017년	2018년
계	400	0	400
시 도 비	400		400

□ 추진실적(공정률 100%)

○ ‘15.  1. ~ 9. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 2015. 11. 13. : 유치 신청서 제출(울산시→한국무용협회)

○ 2016.  2. 19. : 개최지 울산 확정(한국무용협회)

○ 2017.  3. 11. : 전국무용제 사무국 개소

○ 2017.  3. 23. : 관계자회의 개최(울산문화예술회관)

○ 2017. 9. 14.(목) ～ 9. 23.(토) : 전국무용제 개최

- 개․폐막행사, 축하공연, 부대행사, 경연대회 및 시상

- 단체상 은상 수상, 개인상 최우수 연기상 수상

사업명

울산대공원 장미원 빛축제

담당자

녹지공원과 이봉건(☎229-3341)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 도시브랜드를 널리 알리고 울산대공원의 겨울 대표축제로 육성하여       국내․외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ 타 축제와 차별화되는 콘텐츠를 구성하여 관광자원 홍보효과 극대화 및 도시        이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. 11. ~ 2018. 1. 21. (72일간)

○ 위 치 : 울산대공원 장미원 일원

○ 규 모 : 개막행사, 빛 조형물 설치, 홍보, 체험프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000	500	500	580	420
국 비
시 도 비	2,000	500	500	580	420
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 울산대공원을 찾는 시민과 방문객들에게 겨울철 새로운 볼거리 제공

○ 축제장 방문객 102,333명, 입장료수입 229백만원

□ 향후계획

○ 제3회 울산대공원 장미원 빛축제 추진 : 2018. 12. 8. ~ 2019. 2. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

울산수목원 조성

담당자

녹지공원과 배도권(☎229-6121)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수목유전자원 증식·보전을 통한 산림생물다양성 확보

○ 산림교육·체험·휴양·치유 프로그램 운영을 통한 산림복지서비스 확대

○ 산림이용에 대한 올바른 이해와 창의 적인 시민의식 함양

□ 사업개요

○ 기    간 : 2015. ∼ 2019.

○ 위    치 : 울산 울주군 온양읍 운화리 1320-2번지 일원

○ 규    모 : 20ha

○ 주요시설 : 주차장, 주제원, 산림교육문화센터, 진입로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	25,500		6,464	16,340	2,696
국 비	4,850			4,850
시 도 비	11,650		6,464	2,490	2,696
시군구비
지 방 채	9,000			9,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10.2%)

○ 2017. 2. 23. : 수목원 조성계획 승인

○ 2017. 8. 18. : 지방재정중앙투자심사 통과(행정안전부)

○ 2018. 1. 25. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. : 공사준공(1월) 및 수목원 개장(6월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

물순환 선도도시조성 저영향개발 시범사업

담당자

환경정책과 허정식(☎229-3273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시화에 따른 붉투수층의 증가로 하천 수질오염, 열섬효과 등의 문제점을

개선하기 위해 저영향개발 시범사업 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3년)

○ 위 치 : 남구 삼호동 일원

○ 내 용 : 저영향개발 시범사업(식생수로, 빗물정언, 체류지 조성 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,600		400	2,200	7,000
국 비	4,800		200	1,100	3,500
시 도 비	4,800		200	1,100	3,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.2%)

○ 물순환 선도도시 선정 : 2016. 5.

○ 사업수행능력 평가완료 및 가격입찰 공고 : 2017. 9.

○ 기본 및 실시 설계 용역 착수 : 2017.10.

□ 향후계획

○ 기본설계 완료 : 2018. 4.

○ 주민설명회 및 의견수렴 : 2018. 5.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2018. 8.

○  시범사업 착공 : 2018. 10.(준공 2019.12.)

사업명

석유화학단지 완충저류시설 설치

담당자

환경정책과 허정식(☎229-3273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 또는 공업지역 내 사고･화재 등으로 인한 사고 유출수 및 초기

우수의 하천, 연안 유입 방지를 위한 저류시설 설치로 수질오염 방지 및

수질개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남구 석유화학단지 일원

○ 규 모 : 저류능력 22,000㎥, 전처리 시설, 저류시설, 이송설비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	32,920		693	12,017	20,210
국 비	23,044		500	8,412	14,132
시 도 비	9,876		193	3,605	6,078
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2.1%)

○ 완충저류시설 설치운영방안에 대한 연구용역 : 2015.12.~2016.8.

○ 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2017. 5.

□ 향후계획

○ 완충저류시설 용량 및 사업비 조정협의 : 2018. 1.~2.

○ 설계경제성 검토 및 지방건설기술심의 : 2018. 3. ~ 5.

○ 보상계획 공고 및 협의보상 추진 : 2018. 3. ~ 9.

○ 산업단지 계획변경 및 실시계획 고시 : 2018. 4. ~ 7.

○ 설계승인 및 총사업비 확정 : 20148. 6. 8.

○  공사 착공 : 2018. 10. (준공 2021.12.)

사업명

십리대숲 생태관광센터 건립

담당자

환경정책과 석욱진(☎229-3142)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한민국 20대 생태관광지인 태화강 십리대숲에 방문객수 급증에 따른

우리시의 우수한 문화관광 콘텐츠로의 역할 증대

○ 홍보와 방문객을 위한 체계적인 안내 기능을 수행하는 거점 안내센터 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~2018. 10.

○ 위 치 : 중구 태화동 667번지외 5필지(오산 일원)

○ 내 용 : 안내소, 전시/홍보관, 교육장, 회의실, 기념품 판매장 등

○ 건축면적/연면적 : 392.84㎡/683.56㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,100		174	2,926
국 비
시 도 비	3,100		174	2,926
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.6%)

○ 설계공모 및 당선작 선정 : 2017. 3.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 5. ~ 12.

○ 하천점용허가 및 문화재표본조사 실시 : 2017. 11.

○ 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 : 2017. 11.

□ 향후계획

○ 공사착공 : 2018. 2.(준공 2018.10.)

사업명

울산전시컨벤션센터 건립

담당자

통상교류과 변종대(☎229-6031)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 최대 규모의 글로벌 기업이 입지한 국제적 산업도시로의 성장과 지역경제 및 수출 활성화를 위해 전시·회의산업 기반 구축

○ 마이스(mice) 산업의 앵커시설인 전시컨벤션센터 건립을 통한 지역 산업구조 고도화 및 새로운 미래 성장 동력원 창출

□ 사업개요

○ 위  치 : KTX울산역 역세권(울주 삼남면 교동리 1683-1번지)

○ 기  간 : 2016년 ~ 2020년(5년)

○ 규  모 : 부지 43천㎡, 건축 42.9천㎡(지상 3층, 지하 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 167,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	167,800	18,245	28,070	10,120	111,365
국 비	28,000	0	28,000	0	0
시 도 비	139,800	18,245	70	10,120	111,365

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ '13.  7. : 전시컨벤션센터 건립계획 타당성 승인(산업부)

○ '17.  7. : 기본 및 실시설계용역 완료

○ `17. 10. : 전시컨벤션센터 운영 계획 수립

○ '17. 11. : 운영 기반 구축을 위한 양해각서 체결(시↔울산도시공사)

○ '17. 12. : 시공사 계약 및 건립공사 착공(주식회사 한진중공업)

□ 향후계획

○ `18.  8. : 위수탁 사업계획 수립

○ `18. 10.~: 전시컨벤션센터 CI 개발 추진

○ `18. 11. : 센터 관리운영 조례 시행규칙 제정

○ `19. 3.~ : 전시컨벤션센터 관리·운영 위수탁(울산도시공사, 3년)

○ `20. 12. : 건립공사 준공(개관 `21. 3.)

사업명

안전하고 품격있는 상징도로 조성

담당자

교통정책과 박정호(☎229-4261)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안전하고 품격있는 교통환경을 위한 상징도로 조성사업을 추진하여 교통       혼잡 개선 및 효율 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11. 10 ~ 2018. 9. 30

○ 위 치 : 중앙로 구간(태화로터리~시청사거리, L=22.9km)

○ 규 모 : 차도 및 보도 정비, 중앙화단 조성, 교통안전시설 개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,100	3,000		2,100	8,000
국 비
시 도 비	12,400	3,000		2,100	8,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	700

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2017.  7. 17 : 실시설계용역 완료

○ 2017. 11. 10 : 중앙로(시범구간) 공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 9. : 중앙로(시범구간) 공사 준공

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

화봉제1공원 공영(지하) 주차장조성사업

담당자

교통정책과 김길동(☎229-4284)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공원 인근 주거지 및 상업지역의 주차공간 부족으로 인해 교통혼잡 발생과 주민불편이 가중되어, 부족한 주차시설 해소를 위해 공영주차장을 조성하고 지역의 주거환경개선에 기여코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019

○ 위 치 : 북구 화동 445-1번지 일원

○ 규 모 : 주차정 조성 131면, A=4,435㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,000		2,000	1,620	3,380
국 비	3,500		2,000	1,500
시 도 비	3,500			120	3,380
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2017. 6. : 공유재산관리계획안 시의회 의결

○ 2018. 3. ~ 10. : 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2018. 12. : 공영주차장 조성사업 착공

○ 2019. 12. : 공영주차장 조성사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

울산광역시 청사 증축

담당자

회계과 김명성(☎229-2572)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방재·소방 등 관련시스템 통합운영에 필요한 내진성능을 갖춘 통합관리센터

설치필요

○ 현재의 충무상황실은 내진성능 및 화생방 방호시설이 없어 비상사태 시

고유기능 수행곤란

○ 행정수요 증가에 따라 기존 전시실, 회의실, 편의시설 등을 사무실로 전환

사용에 따른 사무공간 혹보 및 부족한 주차장 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ~ 2018년 6월(2년 6개월)

○ 위 치 : 울산광역시 남구 중앙로 201(청사부지 내)

○ 규 모 :  지하2층지상5층 연면적 12,316㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계
국 비
시 도 비	30,000		5,990	17,650	6,360
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2016.  4. ~ 8. : 설계용역(5개월)

○ 2016. 11.     : 공사착수

○ 2018.  6.     : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 증가(당초 200억원 → 300억원)

- 주차장 증가(125대 → 245대), 충무상황실 설치 등

사업명

역세권 복합환승센터 주변 기반시설 정비

담당자

도시개발과 김기찬(☎229-4371)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권 복합환승센터 주변 기반시설 정비로 언양 시가지와 연계한 울산 서부권 지역개발 촉진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년(4년간)

○ 위 치 : 울주군 울산역로 310번길 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=0.92Km, B=25~50m(지하차도 L=0.59Km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 36,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	36,700		930		35,770
국 비	11,010				11,010
시 도 비	25,690		930		24,760
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계 70%)

○ ‘14. 3.~’15.7. : 연계교통구축계획 국토부 협의 및 연계교통시설 지정․고시

* 국도35호선~울산역세권간을 연결하는 연계교통시설로 지정

○ 2017.  6 : 지방재정 중앙투자사업 심사(2017년 제2차, 조건부 승인)

○ 2017.  7. : 실시설계용역 사업비 반영(2017. 제1회 추경예산)

○ 2017. 11. : 실시설계용역 착수(2018. 12. 준공)

□ 향후계획

○ 2019. 1. ~ : 토지보상 및 공사 발주

○ 2021. 12.  : 공사 준공

※ 실시설계용역 결과에 따라 사업비 결정 후 행정절차 이행

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

효문공단 내부도로 개설공사

담당자

도시개발과 임순택(☎229-4392)

□ 사업목적 및 필요성

○ LH공사 시행 효문지구 잔여지 개발사업과 연계 시행

○ 국가산단내 도로망 확충으로 원활한 물류수송 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 북구 효문·연암동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.67km, B=15~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,500	1,053	5,995		4,452
국 비
시 도 비	11,500	1,053	5,995		4,452
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

○ 2016.  7.   : 실시설계용역(보완) 준공

○ 2016. 11.   : 협의보상 통보

○ 2017.  4.   : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2019.  12.   : 공사 준공

사업명

노동복지센터 건립

담당자

기업육성과 전종호(☎229-2841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 現 노동복지회관의 노후화로 신축을 통한 시설의 안정성 도모

- 준공 30여년이 경과되어 안정성 및 도시미관 저해

- 매년 보수비용 발생으로 예산낭비 요인이 되며 근본적 해결 필요

□ 사업개요

○ 위    치 : 現 노동복지회관 부지 내

○ 사업기간 : 2017. 하반기 ~ 2018. 12월

○ 소요예산 : 7,002백만원(시비 7,002)

○ 사업규모 : 지하 1층, 지상 6층, 면적 539.8㎡ 건축연면적1,956㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,002백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,002		270	6,732
국 비
시 도 비	7,002		270	6,732
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ ‘17. 8월 : 공사업무 전반 업무 이관(종합건설본부)

○ ‘17. 9월 : 실시설계

○ ‘18. 3월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘19년 8월 : 공사 준공

10-2. 지방채 발행사업 : “해당없음”

10-3. 민간투자사업

우리 시에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	06년 울산광역시 하수관거 임대형 민자사업	울산청천 (주)	114,245	72,267	10,965	154,653	‘11.1.21 ~ ‘31.1.20
	08년 울산광역시 하수관거 임대형 민자사업	울주청천 (주)	108,056	28,222	10,001	168,849	‘14.3.3 ~ ‘34.3.2
	울산박물관 BTL사업 (울산박물관)	㈜울산박물관	47,251	30,909	4,703	66,705	‘11.2 ~ ’31. 1.
BTO	농소하수처리장 민간투자사업	울산맑은환경 (주)	147,214	14,796	16,756	466,186	‘16.2.27 ~ ‘36.2.26
	하수슬러지 민간투자사업	울산 에스코 (주)	26,051	40,916	6,638	74,115	‘11.1.29~ ‘26.1.8
	굴화․강동 하수처리시설 민간투자사업	푸른 울산 (주)	102,551	53,691	14,468	308,409	‘12.9.15 ~ ‘32.9.14
	자원회수시설 민간투자사업	울산그린(주)	163,354	113,002	29,505	132,252	‘12. 10.15 ~ ‘27. 10.14
	약수화물차 휴게소 조성	SK에너지(주)	19,938	10,635	9,303	-	‘18.1 ~ ‘51.12
	울산대교 및 접속도로	울산 하버브릿지(주)	486,850	163,150	-	-	‘15.6.11~ ’45.6.10.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

06년 울산광역시

하수관거임대형 민자사업

담당자

하수관리과 김길동(☎229-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동구전지역과 북구 염포․양정동일원의 하수관로를 정비하여 원활한 하수 이송을 통한 주민 보건위생 향상 및 전문기관 유지관리를 통한 대민 하수행정 서비스 질 향상에 기영

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008 ~ 2030    ○ 위    치 : 동구, 북구일원

○ 민간사업자 : 울산청천(주)  ○ 총사업비 : 114,245백만원

○ 사업규모 : 오수관로 L=123.4km, 배수설비 11,288개소 등

□ 재정부담 현황

○ 임대료는 80분기로 균등지급, 운영비는 경상가를 반영하여 지급

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019 이후
계	237,885	72,267	10,965	11,033	143,620
국 비	49,928	16,357	2,388	2,388	28,795
시 도 비	187,957	55,910	8,577	8,645	114,825
시군구비
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 잔여기간 임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

08년 울산광역시

하수관거임대형 민자사업

담당자

하수관리과 김길동(☎229-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울주군 언양, 상북, 삼남, 삼동, 온양읍일원 하수관로를 정비하여 원활한 하수 이송을 통한 주민 보건위생 향상 및 전문기관 유지관리를 통한 대민 하수행정 서비스 질 향상에 기영

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010 ~ 2034   ○ 위    치 : 울주군 일원

○ 민간사업자 : 울주청천(주) ○ 총사업비 : 108,056백만원

○ 사업규모 : 오수관로 L=156.9km, 배수설비 7,515개소 등

□ 재정부담 현황

○ 임대료는 80분기로 균등지급, 운영비는 경상가를 반영하여 지급

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019 이후
계	207,072	28,222	10,001	10,033	158,816
국 비	121,044	17,130	6,052	6,052	91,810
시 도 비	86,028	11,092	3,949	3,981	67,006
시군구비
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 잔여기간 임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

농소하수처리장 민간투자사업

담당자

하수관리과 이병률(☎229-3294)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중구와 북구 농소지역의 급속한 개발로 인한 하수 발생량 급증으로 용연 및 방어진하수처리장의 처리용량 한계로 하수처리장 신설

□ 사업개요

○ 기      간 : 2009 ~ 2016년

○ 위      치 : 북구 시례새터길 190

○ 민간사업자 : 울산맑은환경(주)/롯데건설 외 5개사

○ 총사업비 : 147,214(‘09년 3월 1일 불변가격 기준)

○ 사업규모 : 100천㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 시설운영 20년간

○ 지금까지 재정부담액(사용료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019 이후
계	497,738	14,796	16,756	18,188	447,998
국 비
시 도 비	497,738	14,796	16,756	18,188	447,998
시군구비
기타(민자)

□ 추진단계

○ 2016.  2. 26. : 시설준공

○ 운영중

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

하수슬러지 민간투자사업

담당자

하수관리과 임정호(☎229-3292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 효율적인 하수처리시설의 운영을 통해 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 처용로 524

○ 시설용량 : 300톤/일(150톤/일×2기)

○ 사업기간 : 2006 ~ 2011년

※ 운영기간 : 2011. 1. 9 ∼ 2026. 1. 8(15년간)

○ 총사업비 : 26,051백만원(‘06년 1월 1일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 울산에스코(주)/한솔이엠이(주) 외 2개사

※ 운영사 : 울산에스코(주)(운영기간 : 15년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 15년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019 이후
계	121,669	40,916	6,638	7,907	66,208
국 비
시 도 비	121,669	40,916	6,638	7,907	66,208
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

굴화·강동 하수처리시설 민간투자사업

담당자

하수관리과 이정채(☎229-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수발생량 증가에 따른 하수처리장 신설로 처리구역 내 발생되는 하수의 완벽한 처리를 통해 방류수역의 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 울주군 범서읍 울밀로 2793-24, 북구 산하동 산음3길 32

○ 사업개요 : 47천㎥/일, 5천㎥/일, 하수관로 5.62km, 44.88km

○ 공사기간 : 2010. 3. 15 ~ 2012. 9. 14

※ 운영기간 : 2012. 9. 15 ∼ 2032. 9. 14(20년간)

○ 총사업비 : 102,551백만원(‘06년 2월 28일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 푸른울산(주)/롯데건설

※ 운영사 : 푸른울산(주) (운영기간 : 20년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 20년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	376,568	53,691	14,468	14,958	293,451
국 비
시 도 비	376,568	53,691	14,468	14,958	293,451
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

자원회수시설

담당자

자원순환과 최상원(☎ 229-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성암 소각장 증설 및 매립장 확장으로 위생적이고 안정적인 생활폐기물 처리

○ 매립폐기물 감량화, 소각열을 이용한 자원회수 및 온실가스 감축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 10. 15 ~ 2012. 10. 14.(36개월)

○ 위    치 : 울산 남구 처용로 524

○ 민간사업자 : 울산그린㈜

○ 총사업비 : 163,354백만원(국비 45,930, 민자 117,424)

○ 사업규모 : 매립장조성 158천㎥, 소각장건립 250톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영기간 : 2012. 10. 15 ~ 2027. 10. 14(15년간)

- 운영범위 : 매립장운영(158천㎥) 및 소각장 운영(650톤/일)

- 사업추진 : BTO방식(시설 준공 후 15년간 관리운영권 설정)

※ 최소운영수익보장(MRG) : 없음

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2018년 이후
계	438,113	276,356	29,505	30,400	101,852
국 비	45,930	45,930	0	0	0
시 도 비	274,759	113,002	29,505	30,400	101,852
시군구비	0	0	0	0	0
기타(민자)	117,424	117,424	0	0	0

□ 추진단계 : 운영중

○ 운영기간 중 생활폐기물 처리량에 따른 사용료 지급

- 2017년 사용료 98,639원/톤

- 기준사용료 : 소비자 물가지수 반영

□ 향후계획

○ 생활폐기물 자원회수시설 효율적 운영 및 감독

사업명

약수화물자동차 휴게소 조성

담당자

물류택시과 김형규(☎229-4111)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선진국형 화물자동차 휴게소 조성을 통한 물류인프라 구축

○ 운수종사자 휴식․복지공간 제공과 도심지 불법 주․박차 해결

□ 사업개요

○ 기     간 : 2012. ～ 2017.   ○ 위    치 : 울산 북구 신천동 618-5번지 일원

○ 민간사업자 : SK에너지(주)   ○ 총사업비 : 19,938백만원

○ 사업규모 : 부지 41,969㎡, 주차면수 377대

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 사업수익률 : 세전 실질수익률 5.43%

- 운영기간 : 34년

- 최소운영수입보장(MRG) 미실시

- 사용료 : 소비자 물가지수 누적변동분 범위 내에서 산정

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	19,938	10,635	9,303	-	-
국 비	2,807	2,807
시 도 비	4,000	4,000
시군구비
민간자본	13,131	3,828	9,303

□ 추진단계(운영 중)

○ 2012.  2. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 2013.  6. : 제3자 제안 공고

○ 2013. 10. : 협상대상자 지정(SK에너지(주))

○ 2014. 11. : 민간투자사업심의위원회 심의, 협약 체결

○ 2016.  3. : 착공

○ 2017.  1. : 실시계획변경인가

○ 2017. 12. : 사업준공

□ 향후계획

○ 2018. 11. : 2019년 화물자동차 휴게소 유지관리 및 운영계획 검토‧승인

사업명	울산대교 및 접속도로 민간투자사업	담당자	건설도로과 최진곤(☎229-4092)
□ 사업목적 및 필요성 ○ 울산시 남구와 동구를 연결하는 광역교통축 신설로 산업경쟁력 강화 및 교통체증 해소 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010. 5. 31. ~ 2015. 5. 30. ○ 위 치 : 울산광역시 남구 매암동(북구 아산로) ~ 동구 일산동 ○ 민간사업자 : 울산하버브릿지(주) ○ 총사업비 : 486,850백만원 ○ 사업규모 : 도로개설 L=8.35㎞(본선 5.59, 연결로 2.76), 현수교 1.15㎞, 2~4차로 □ 추진단계(운영 중) ○ ‘15. 6. 11. ~ ’45. 6. 10. : 민자도로 30년간 운영

사업명

울산박물관 BTL사업

담당자

울산박물관 신지훈(☎229-4712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산 문화재를 수집·보존·전시하고 교육·체험을 위한 문화시설 확보

□ 사업개요

○ 사업기간

- 공사기간(25개월) : 착공일 (2009년 1월 2일 ~ 2011년 1월 31일)

- 운영기간(20년) : 운영개시일 (2011년 2월 1일 ~ 2031년 1월 31일)

○ 위치 : 울산광역시 남구 신정동 두왕로 277

○ 민간사업자 : ㈜울산박물관 [(주)한화건설 외 6개사]

○ 총사업비 :  47,251백만원

○ 사업규모 : 부지 33,058㎡,  건축연면적 14,408㎡(지상 2층, 지하 1층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 20년간 임대료 및 운영비 분할 지급

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	102,317	30,909	4,703	4,818	61,887
국 비	22,128	7,256	1,054	1,054	12,764
시 도 비	80,189	23,653	3,649	3,764	49,123

□ 추진단계(운영중)

○ 주무관청 : 시설의 사용, 성과의 점검 및 평가, 임대료 및 운영비 지급

○ 사업시행자 : 유지관리 및 운영, 성과의 측정 및 보고, 차입금 상환 및 배당

□ 향후계획

○ 성과평가(상․하반기) 후 정부지급금 차등지급

□ 사업변경 내역

○ 해당없음