109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 시에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
화봉제1공원 지하주차장 조성사업	8,000	-	175	7,000	825	2020	2017	38.69
안전하고 품격있는 상징도로 조성	2,768	628	2,140	-	-	2018	2017	100
울산대공원 장미원 빛축제	2,000	500	580	420	500	계속사업	2016	매년시행
창작뮤지컬 '외솔'	3,107	1,300	750	557	500	계속사업	2016	100
한글문화예술제	3,170	2,200	570	570	570	계속사업	2016	100
처용문화제	5,995	4,945	350	350	350	계속사업	2016	100
울산월드뮤직페스티벌	2,299	535	588	588	588	계속사업	2016	100
아시아퍼시픽뮤직미팅	2,555	1,535	340	340	340	계속사업	2016	100
서머페스티벌	7,710	4,700	1,270	870	870	계속사업	2016	100
수요열린예술무대 뒤란	600	600	581	582	600	계속사업	2016	60
산단내 에너지신산업 활성화를 위한 ESS 보급확대	10,200		10,200			2020	2017	100
원전해체 핵심요소기술 원천기반 연구센터	4,100	1,500	700	700	1,200	2021	2016	53
삼호동, 태화동 송전선로 지중화사업	34,600				34,600	2023	2018	5
노동복지센터 건립	8,404	1,400	4,974	2,030		2019	2017	45
성암매립장 최종복토공사	3,203	96	503	2,604		2019	2017	100
가천 중소기업단지 진입도로 개설사업	29,480	18,568	4,934	5,978		2019	2013	80
웅촌면사무소~춘해대학 도로확장사업	25,000	1,300	1,500	4,500	17,700	2023	2017	미착공 (보상중)
태화강 봄꽃대향연	250	0	250			2018	2017	100
태화강 정원박람회	2,080	0	2,080			2018	2017	100
초장수명 ESS용 이차전지 기술개발 사업	6,500	1,200	1,600	1,800	1,800	2020	2017	70
바이오화학소재 공인인증센터 구축	17,000	-	822	4,008	12,170	2022	2018	17
울산 게놈프로젝트사업	10,800	3,600	3,200	4,000		2019	2017	60
두동면 일원 송·배수관 부설사업	8,860	-	885	4,118	3,857	2021	2017	10
효문공단 내부도로 개설공사	11,500	1,877	1,501	2,005	6,117	2020	2015	37

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

화봉제1공원 지하주차장 조성사업

(교통사업특별회계)

담당자

교통기획과 박동희

(☎229-4821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화봉동 일원은 95년 이전에 건축된 공동주택, 화봉시장과 상가가 밀집지역으로 주차장이 부족하여 교통정체와 만성적인 주차난을 겪고 있는 지역으로 열악한 주차난 해소를 위해 공영주차장 조성이 매우 시급함.

○ 화봉동 일원은 도심지가 형성되어 있어 주차장 부지확보가 불가하여 기존 근린공원 지하에 주차장을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 3월 ～ 2020년 3월

○ 위 치 : 울산광역시 북구 화봉동 445-1번지

○ 규 모 : 주차장 조성 130면, A=4,361㎡, 조경공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000	-	175	7,825	-
국 비	3,500	-	175	3.325	-
시 도 비	4,500	-	-	4,500	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38.69%)

○ '17.  6월 : 지방재정투자심사, 공유재산 관리계획 심의 완료

○ ‘18.  3월 : 실시설계 용역 착수(’18. 10월 완료)

○ ‘18.  8월 : 도시관리계획(화봉지구 지구단위계획) 결정(변경)

○ ‘18. 12월 : 주차장 조성공사 착공(1차분, 건축․토목)

○ ‘19.  2월 : 주차장 조성공사 착공(소방, 전기, 통신, 폐기물, 감리)

○ ‘19.  7월 : 전체 공정률(38.69%), 구조물 벽체 및 슬라브 작업

□ 향후계획

○ ‘20. 3월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	사업시행자	사업규모 (주차면수)	소요예산 (단위 : 억원)	사업기간
당초	울산광역시 북구청장	150면	70 (국35, 시17.5, 구17.5)	2017. 1. ~ 2018. 7.
변경	울산광역시장	130면	80 (국35, 시45)	2018. 3. ～ 2020. 3.

사업명

안전하고 품격있는 상징도로 조성

담당자

교통기획과 권창욱

(☎229-4261)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통체계 및 보행환경개선을 통해 교통 혼잡완화와 교통약자 등의 이동편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.11.10. ~ 2018.7.31.(용역기간 ‘16.6.22.~17.7.17.)

○ 위 치 : 남구 중앙로 구간(태화로타리~시청사거리)

○ 규 모 : L=1.2㎞, B=30.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,768백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,768	628	2,140	-	-
국 비
시 도 비	2,768	628	2,140	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  6. 22. : 실시설계 용역 착수(’17.7.17. 용역준공)

○ 2016.  8. 29. : 중기지방재정계획(2017 ~2021)

○ 2017. 10. 25. : 지방재정 투자심사(가결)

○ 2017. 11. 10. : 공사착공(2018.7.31. 준공)

○ 2018. 10. 17. : 시설물 이관(녹지공원과, 종합건설본부, 남구청)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

울산대공원 장미원 빛축제

담당자

녹지공원과 김성대

(☎229-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 도시브랜드를 널리 알리고 울산대공원의 겨울 대표축제로 육성하여       국내․외 관광객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

○ 타 축제와 차별화되는 콘텐츠를 구성하여 관광자원 홍보효과 극대화 및 도시        이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 12. 8. ~ 2019. 1. 27. (51일간)

○ 위 치 : 울산대공원 장미원 일원

○ 규 모 : 개막행사, 빛 조형물 설치, 홍보, 체험프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2019년 이후
계	2,000	500	580	420	500
국 비
시 도 비	2,000	500	580	420	500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 울산대공원을 찾는 시민과 방문객들에게 겨울철 새로운 볼거리 제공

○ 축제장 방문객 68,662명, 입장료수입 144백만원

□ 향후계획

○ 제4회 울산대공원 빛축제 추진 : 2019. 12. 20. ~ 2020. 1. 27.(예정)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

창작뮤지컬 ‘외솔’

담당자

문화예술과 김경철(☎229-3721)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 인물 최현배의 위대한 삶과 역사를 공연미학으로 재해석하여

현대공연 뮤지컬로 승화시키면서 지역문화 정체성확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 12.

※ 공연 1차 : ‘18.  6.29.(금), 19:30 / 6. 30.(토), 19:00,

2차 : ‘18.  7. 6.(금), 19:30 / 7. 7.(토), 19:00,

3차 : ‘18. 10. 9.(화) 10:35

○ 장 소 : 대구아양아트센터/문화예술회관 대공연장/광화문광장

○ 규 모 : 130분(1막 55분, 2막 55막, 인터미션 20분)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,107	1,300	750	557	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,107	1,300	750	557	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○ ‘18. 5월 : 제작업체 선정

○ ‘18. 6월 : 제작발표회 개최

○ ‘18. 6. ~ 10. : 작품공연

□ 향후계획

○ 사업결과보고 및 정산 : 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

한글문화예술제

담당자

문화예술과 최선미(☎229-3722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 외솔 최현배 선생의 업적 및 한글의 우수성과 매력을 널리 알리고

○ 축제를 통해 외솔 최현배 선생과 울산지역의 우수한 문화 콘텐츠를

발굴‧홍보하여 지역의 자산에 대한 시민들의 관심 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 10. 7. ~ 10. 9.(3일간)   ※ 572돌 한글날(10. 9.) 기념하여 행사 개최

○ 위 치 : 중구 원도심 일원, 외솔기념관 등

○ 규 모 : 개․폐막식, 전시․체험행사, 글 그림 공모전, 한글 학술대회 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,170백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자(2012~)	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,170	2,200	570	570	570
시 도 비	3,170	2,200	570	570	570

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%))

○ 관련기관, 단체 등 회의 : 8월

○ 기본계획 수립 : 9. 10.

○ 사업 시행 : 10. 7. ~ 10. 9.

□ 향후계획

○ 사업 결과보고 및 정산 : 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

처용문화제

담당자

문화예술과 박지영(☎229-3751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 처용문화제 개편을 통해 축제로서의 개성과 정체성을 명확히 하고

시민이 함께 즐길 수 있는 문화도시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 일시/장소 : 11. 3.(토) ∼ 11. 4.(일) / 달동문화공원 일원

○ 주    제 : ‘희망’, ‘화합’, ‘도약’

○ 슬 로 건 : ‘처용! 미래를 춤추다’

○ 주요내용 : 처용맞이, 개막식, 주제관 운영, 대동놀이 등

○ 주최/주관 : 울산광역시 / 울산문화재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,995백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,995	4,945	350	350	350
시 도 비	5,995	4,945	350	350	350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’18.  4. : 기본계획 수립

○ ‘18.  5. : 1차 운영위원회 개최

○ ‘18.  6. : 무대시스템 운영계획 수립 및 계약

○ ‘18.  7. : 2차 운영위원회 개최

○ ‘18.  8. : 종합추진계획 수립

○ ‘18. 11. : 처용문화제 개최

○ ‘18. 12. : 결과보고

□ 향후계획

○ ‘19.  1. : 2019년 사업계획 수립

사업명

울산월드뮤직페스티벌

담당자

문화예술과 박지영(☎229-3751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제적 명성의 월드뮤직 개최를 통해 국내 대표 음악전문 관광축제로

육성하고 시민들에게는 볼거리를 제공

□ 사업개요

○ 기간/장소 : 2018. 8.31∼9. 2(3일간) / 태화강대공원 일원

○ 내    용 : 국내․외 유명 월드뮤지션을 초청 공연(12팀 정도)

○ 소요예산 : 588,000천원(시비)

○ 주최/주관 : 울산광역시/ 울산문화재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,299백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,299	535	588	588	588
시 도 비	2,299	535	588	588	588

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18.  1. ~  2. : 기본 계획 수립 및 예술감독 위촉

○ ‘18.  3. ~  6. : 콘텐츠 개발 및 프로그램 계획 수립

○ ‘18.  7. ~  8. : 홍보 및 시설 운영안 마련

○ ‘18.  9.      : 울산아트페스티벌 개최

○ ‘18. 11.      : 결과보고

□ 향후계획

○ ‘19.  1.      : 2019년 사업계획 수립

사업명

아시아 퍼시픽 뮤직미팅

담당자

문화예술과 박지영(☎229-3751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 뮤지션들에게 해외 유명 페스티벌과 마켓진출의 기회를 마련하고

한류 세계화를 위한 글로벌 네트워크 구축

□ 사업개요

○ 기간/장소 : 8. 31. ∼ 9. 2(3일간) / 태화강대공원

○ 참여인원 : 120명 정도(해외 20, 국내 100)

- 국내․외 음악관계자 50여명, 쇼케이스 공연팀 10개팀

○ 예 산 액 : 340,000천원(지특 240,000, 시비 100,000)

○ 주    관 : 울산문화재단

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,555백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,555	1,535	340	340	340
국 비	1,810	1,430	240	140
시 도 비	745	105	100	200	340

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 1. ~ 2. : 기본 계획 수립

○ ‘18. 5. ~ 6. : 사업설명회 개최 및 쇼케이스 공모 심사

○ ‘18. 7.      : 델리게이트 초청 대상자 최종 선정

○ ‘18. 8.      : 종합추진계획 수립 및 홍보개시

○ ‘18. 9.      : 아시아퍼시픽뮤직미팅 개최

○ ‘18. 11.    : 결과보고

□ 향후계획

○ ‘19. 1.     : 2019년 사업계획 수립

사업명

서머페스티벌

담당자

문화예술과 박지영(☎229-3751)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 장르를 반영한 7일간의 릴레이 콘서트로 대한민국 대표

여름밤 축제로 자리 매김

□ 사업개요

○ 시    기 : 2018. 4. 13.∼4. 24., 7. 23. ~ 7. 29. <6일간>, 7. 26일 휴식

○ 장    소 : 태화강지방정원, 종합운동장보조경기장, 강동중앙공원,

진하해수욕장, 범서생활체육공원

○ 내    용 : 6개의 테마공연(국내 정상급 가수 60여팀, 400여명 출연)

○ 인    원 : 62,500명(시민, 청소년, 한류 관광객)

○ 주    관 : 울산MBC(사장 최병윤)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,710	4,700	1,270	870	870
시 도 비	4,750	2,850	900	500	500
시군구비	2,960	1,850	370	370	370

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18.  1. : 기본 계획 수립

○ ‘18.  2. : 종합추진계획 수립

○ ‘18.  3. : 홍보 및 시설 운영안 마련

○ ‘18.  4. : 서머페스티벌 개최

○ ‘18.  6. : 결과보고

□ 향후계획

○ ‘19.  1. : 2019년 사업계획 수립

사업명

수요열린예술무대 뒤란

담당자

예술사업과 박용운(☎226-8282)

□ 사업목적 및 필요성

◦ 순수예술과 대중예술이 함께하는 복합 장르 공연으로 시민문화 욕구 충족

◦ 지역예술단체, 전문예술인 등의 출연 기회 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 울산문화예술회관 소공연장, 야외공연장

○ 규 모 : 소공연장(472석), 야외공연장(650~1,000명정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
국 비
시 도 비		600	581	582	600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

○ 2017년 뒤란 24회 추진(19,936명 관람)

○ 2018년 뒤란 25회 추진(15,916명 관람)

○ 2019년 뒤란 14회 추진(15,916명 관람)

○ 뒤란 14회 추진(8,980명 관람 / 2019.7.25. 기준)

□ 향후계획

○ 향후 뒤란 11회 추진 예정

- 소공연장(총4회)

- 야외공연장(총7회)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 매년 30회로 계획하나 기상상황으로 4회정도 취소되어 평균 약26회 추진

사업명

산단내 에너지신산업 활성화를 위한 ESS 보급확대

담당자

에너지산업과 박승호(☎229-2833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지내 에너지다소비그룹에 대해 ESS보급 확대로 전력 피크부하 및       블랙아웃에 적극 대응

○ ESS 구축 ‧ 활용을 통한 전기요금 절감 등 에너지효율 최적화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 2018. 3월

○ 위 치 : 국가산업단지내 7개 사업장

○ 규 모 : 에너지저장장치(ESS) 20.4MWh 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,200		10,200
국 비	2,400		2,400
시 도 비	2,400		2,400
시군구비
지 방 채
민간자본	5,400		5,400
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 지역에너지신산업 공고 및 공모사업 확정 : `17. 3. 28.

○ 협약 체결 및 ESS 구축사업 본격추진 : `17. 3. ~ `18. 3.(사업완료)

□ 향후계획 : 없음

□ 사업변경 내역 : 총사업비

○ 변경내역

구분	변경전		변경후		변경사유
	사업비	비율	사업비	비율
총 계	132억원	100%	102억원	100%	「지역에너지신산업 활성화 지원사업(산업부 17.8.30 개정)」 사업비 관리․사용․정산지침에 의거, 부가세 및 부대비용(통합관제센터 구축 등) 부분에 대한 민자부분은 사업분리 후 별도 추진
국비	24.3	18.5%	24.3	24%
시비	24.3	18.5%	24.3	24%
민자	83.4	63%	53.4	52%

사업명

원전해체 핵심요소기술 원천기반 연구센터

담당자

에너지산업과 노영배(6812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원전해체 관련 정립되지 않은 핵심 요소기술에 대해 국내 전문성 있는 대학 및 연구기관과 연대하여 독창적 원천기술개발 및 해체 인력 양성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 11. 30. ~ 2021. 10. 31.(60개월)

○ 위 치 : 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 울산과학기술원

○ 규 모 : 핵심요소기술 연구센터(112동 509호 및 303호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,100	1,500	700	700	1,200
국 비	3,100	1,100	500	500	1,000
시 도 비	500	200	100	100	100
시군구비	500	200	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  53 %)

○ 총 연구기간 60개월 중 32개월 수행 완료 (2단계 2차년도 수행 중)

○ 원전해체에 필요한 방사선 모니터링, 폐기물 처리 및 안전성 평가 기술에 대하여 실험실 수준의 연구 수행 완료

□ 향후계획

○ 원전해체 현장에 적용할 수 있는 핵심기술 기반 마련

○ 방사성 폐기물 처리 및 방사선 모니터링을 통한 원전해체 과정 전주기에 대한 방사선학적 안전성 확보 기술 도출

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

삼호동, 태화동 송전선로 지중화사업

담당자

에너지산업과 차명환(☎229-2832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼호동, 태화동 송전선로 주변지역 주민숙원사업 및 민원해결

○ 도시 주거환경 개선 및 도시개발 저해요인 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월 ~ 2023. 6월

○ 위 치 : 울산광역시 남구 삼호동 및 중구 태화동 일원

○ 규 모 : 154㎸ 신울산~태화 T/L 2회선 1.9㎞

154㎸ 외동 ~ 옥동 T/L 2회선 1.6㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 34,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	34,600	0	0	0	34,600
국 비
시 도 비	17,300	0	0	0	17,300
시군구비
지 방 채
민간자본	17,300	0	0	0	17,300
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘17. 10. ~ ’18. 06. : 사업 협약체결 및 사업준비

○ ‘18. 07. ~ ’19. 08. : 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

○ ‘20. 01. : 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

노동복지센터 건립

담당자

일자리노동과

전종호(☎229-2841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노동복지회관의 노후화로 신축을 통한 시설의 안정성 도모

○ 근로자를 위한 고용ㆍ문화ㆍ교육ㆍ복지가 결합된 노동복지센터를 건립

하여 종합복지서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8월 ~ 2019. 6월

○ 위 치 : 남구 돋질로 129(신정동) 現 노동복지회관

○ 규 모 : 부지면적 : 540㎡(163평) / 연면적 : 1,851㎡(561평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,404백만원(시8,404)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
시 도 비	8,404	1,400	4,974	2,030

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2017. 6. : ‘17년 추경예산 반영 (270백만원)

○ 2017. 7. : 지방재정투자심사

○ 2017. 하반기 : 기본 및 실시설계, ‘18년 당초예산 신청(6,734백만원)

공유재산관리계획 심의․의결

○ 2018. 3. : 공사 착공

○ 2019. 6. : 공사 준공

□ 향후계획

○ 근로자를 위한 고용ㆍ문화ㆍ교육ㆍ복지가 결합된 종합복지서비스 제공

사업명

자원회수시설

담당자

자원순환과

(☎ 229-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성암 소각장 증설 및 매립장 확장으로 위생적이고 안정적인 생활폐기물 처리

○ 매립폐기물 감량화, 소각열을 이용한 자원회수 및 온실가스 감축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 10. 15 ~ 2012. 10. 14.(36개월)

○ 위    치 : 울산 남구 처용로 524

○ 민간사업자 : 울산그린㈜

○ 총사업비 : 163,354백만원(국비 45,930, 민자 117,424)

○ 사업규모 : 매립장조성 158천㎡, 소각장건립 250톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영기간 : 2012. 10. 15 ~ 2027. 10. 14(15년간)

- 운영범위 : 매립장운영(158천㎡) 및 소각장 운영(650톤/일)

- 사업추진 : BTO방식(시설 준공 후 15년간 관리운영권 설정)

※ 최소운영수익보장(MRG) : 없음

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	672,539	305,861	30,200	30,678	305,800
국 비	45,930	45,930
시 도 비	509,185	142,507	30,200	30,678	305,800
시군구비	0	0
기 타	117,424	117,424

□ 추진단계 : 운영중

○ 운영기간 중 생활폐기물 처리량에 따른 사용료 지급

- 2018년 사용료 100,087원/톤

- 기준사용료 : 소비자 물가지수 반영

□ 향후계획

○ 생활폐기물 자원회수시설 효율적 운영 및 감독

사업명

가천중소기업단지 진입도로 개설사업

담당자

종합건설본부 서영준

(☎229-5855)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산하이테크밸리 산업단지 내 원활한 산업 물동량 수송을 위한 도로 개설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼남면 가천리 및 상천리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.47km, B=25m (4차로)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :        백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	29,480	23,502	4,934	5,978	-
국 비
시 도 비	29,480	23,502	4,934	5,978	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 교량(상천교) 슬라브 타설

○ 1.2km 포장(중간층) 포설

□ 향후계획

○ 2019. 6월 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

웅촌면사무소~춘해대학

도로확장사업

담당자

종합건설본부 신덕희

(☎229-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 춘해대학~서중마을 연결도로 확장을 통한 교통난 해소

○ 웅촌면 지역주민의 숙원사업 해소 및 지역균형개발 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위    치 : 울주군 웅촌면 곡천리 일원

○ 사업규모 : 도로개설 L=0.88㎞, B=10 → 20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계
국 비
시 도 비	25,000	1,300	1,500	4,500	17,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(보상단계, 미착공)

○ 2014.  8월 : 도로개설 건의(웅촌면 권익협의회)

○ 2017. 10월 : 지방재정 투자심사(250억, 적정)

○ 2017.  4월 : 실시설계 완료(‘16. 10. 착수)

○ 2017. 10월 : 실시계획 고시

○ 2018. 2. ~ : 편입물건 보상 추진

□ 향후계획

○ 공사예산 확보(‘19년 추경 및 ‘20년 당초) 후 공사발주

□ 사업변경 내역(해당시) : “해당없음”

사업명

2018년 태화강 봄꽃 대향연

담당자

태화강정원사업단

이미경(229-7562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심 자연생태계의 태화강 지방정원 초화단지를 우리 시 봄철 대표축제로 더욱 발전시켜 전국 명소화 하고, 생태도시로 이미지 개선 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기간/장소 :  ‘18. 5. 10(목) ~5.13(일) / 태화강 지방정원 일원

○ 봄꽃규모 : 봄꽃 초화단지 160,000㎡

- 주요품종 :  꽃 양귀비, 수레국화, 작약 , 안개초 등 10여종

○ 주요내용 : 개막식, 봄꽃 소재의 공연․전시․체험 행사, 시민참여프로그램

※ 2012년부터 시작,  현재까지 총 7회 개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	250	0	250
국 비
시 도 비	250	0	250
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘18. 1월 : 제안서 작성 및 입찰공고

○ ‘18. 2월 : 평가위원회 개최 및 업체선정

○ ‘18. 3월 ~ 4월 : 참여단체, 연계행사 등 세부프로그램 확정, 축제홍보

○ ‘18. 5. 10 ~ 5. 13 : 태화강 봄꽃 대향연 축제 개최

□ 향후계획

○ 우리 시의 생태자원을 활용한 특색 있는 봄꽃 축제 추진 종합 검토

○ 국가정원 지정에 대비한 봄꽃 축제 추진방향 검토

사업명

태화강 정원 박람회

담당자

태화강정원사업단

이미경(229-7562)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태화강 국가정원 지정에 앞서 국가정원 수준에 맞는 품격 있는 정원을 조성하고, 정원문화 확산에 기여

□ 사업개요

○ 기간/장소 :  ‘18. 4. 13(금) ~ 4. 21(토) / 태화강 지방정원 내 초화단지(4만㎡ 정도)

○ 정원규모 : 67개(해외 작가정원3, 국내 작가정원21, 시민정원20, 학생정원23)

○ 주요내용 : 정원(67개소), 산업전(5개소), 학술회의, 정원투어, 공연 ,체험 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,080	0	2,080
국 비
시 도 비	2,080	0	2,080
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘17. 11. 16. : 태화강 정원박람회 기본계획 수립

○ ‘17. 11. 20. : 조직위원회(16명) 구성

○ ‘17. 12.  4. : 조직위원회(1차) 소회의 개최

○ ‘17. 12. 12. : 조직위원회(2차) 회의 개최

○ ‘17. 12. 18. : 작가정원 공모

○ ‘17. 12. 19. : 기반조성공사 실시설계 용역

○ ‘18.  1.  9. : 조직위원회(3차) 회의 개최

○ ‘18.  2.  5. : 조직위원회(4차) 회의 개최

○ ‘18.  2. 12. : 작가정원 심사 (작가정원 20개소 선정)

○ ‘18.  2. 22. : 조직위원회(5차) 회의 개최, 작가정원 워크숍

○ ‘18.  4. 13. ~ 4. 21 : 태화강정원박람회 개최

○ ‘18.  5. 16. : 태화강 정원박람회 사후평가 회의

○ ‘18.  6.  8. : 태화강 정원박람회 유공자 표창

사업명

초장수명 ESS용 이차전지 기술개발 사업

담당자

화학소재산업과 이명화

(☎229-7673)

□ 사업목적 및 필요성

○ ESS 산업 활성화를 위해 수명을 현재 수준에서 2배 향상시켜 ESS 산업

응용분야인 신재생 발전기와 동일 수명(20년)의 수익성을 확보할 수 있는

제품 개발 필요

□ 사업개요

○ 기  간 : 2017년 5월 ～ 2020년 12월(3년 8개월)

○ 위  치 : 울산광역시 울주군 언양읍 UNIST 내 배터리 R&D 센터

○ 사업량 :

- 3대 소재(양극, 음극, 전해액) 원천기술 개발

- 3대 소재 상용화 기술 개발 및 셀 공정기술 개발을 통한 100㎾h급 ESS

실증 및 신뢰성 검증

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,400	1,200	1,600	1,800	1,800
국 비	3,800	800	1,000	1,000	1,000
시 도 비	1,200	300	300	300	300
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	1,400	100	300	500	500
기 타	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ SDI 110 Ah 셀 제조에 필요한 양극(250kg), 음극(80kg), 전해액(10kg) 합성 완료

○ 셀 제조 및 장수명 검증

□ 향후계획

○ 고용량 장수명 셀 평가진행 및 100㎾h급 ESS실증

□ 사업변경 내역(해당시) : 해당없음

사업명

바이오화학소재 공인인증센터 구축

담당자

화학소재산업과 안효경

(☎229-7682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 화학 관련 기업들이 세계적 추세에 따라 바이오매스 기반의

바이오화학제품을 생산‧판매하고자 하나 이에 필요한 인증서 취득지원

기관이 없음

○ 여러 종류의 인증서를 국내‧외적으로 취득하는데 도와줄 수 있는 바이오

화학소재 인증지원 및 인증센터 설치 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 한국화학연구원(바이오화학실용화센터 내)

○ 내 용 : 바이오제품 성분 및 분해성 장비구축(26종) 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	17,000	-	822	4,008	12,170
국 비	10,000	-	475	2,380	7,145
시 도 비	6,000	-	297	1.428	4,275
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,000	-	50	200	750
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  17%)

○ 전용공간 확보 및 설계완료(바이오화학실용화센터 내)

○ 도입장비 심의 승인(4건)

○ 인증관련 분석 기술 확보를 위한 라이브러리 구축 진행

○ 석‧박사급 전문인력 채용 및 전문교육(신규 8명)

□ 향후계획

○ 2019년~2022년 : 인증센터 장비 구축 및 인력양성

사업명

울산 게놈프로젝트 사업

담당자

화학소재산업과 신수정

(☎229-7681)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오헬스산업의 핵심 기술인 유전체(게놈) 연구를 통해 신성장동력 확보 필요

○ 리딩 국가 대열 합류 및 글로벌 시장 선점을 위해 최소 1만명 이상의 한국인 게놈프로젝트 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ～ 2019년 (3년)

○ 위 치 : UNIST내

○ 규 모 : 1만명 한국인 게놈 해독․분석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	10,800	3,600	3,200	4,000	-
국 비	8,900	1,700	2,000	1,900	-
시 도 비	1,900	1,900	1,200	2,100	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 게놈산업기술센터 확장 개소 : 2017. 6. 19., UNIST 제4공학관(11동)

○ 한국인 표준 게놈 서열(KOREF) 고도화

○ 다중오믹스(게놈, 후성유전체, 전사체, 단백질체, 대사체 등) 융합 기술 및 바이오마커 개발, 질병예측 시스템 기술 보유

○ 게놈 분석 리포트 자동화 시스템 구축

○ 한국인 전장게놈 해독․분석 : ‘18년까지 2,400명, ’19년 1,600명

□ 향후계획

○ ‘20년 ~ : 6천명 한국인 전장 게놈 해독․분석

○ 사업변경 투자심사 요청 : ‘19년 8월중

□ 사업변경 내역(해당시)

당 초	변 경
▪ 전장 개놈 해독 : 2천명(‘17∼’18) ▪ 선택적(부분) 게놈 해독 : 8천명(‘19) ▪ 사업기간 : 2016∼2019 ▪ 사 업 비 : 108억원(국56, 시52)	▪ 전장 개놈 해독 : 1만명 ※선택적(부분) 게놈 해독(폐지) ▪ 사업기간 : 2016∼2020(1년 연장) ▪ 사 업 비 : 248억원(국176, 시72)

사업명

두동면 일원 송•배수관 부설사업

담당자

시설관리부 장명섭(☎229-6233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울주군 두동면 일원 상수도 미 공급 지역은 현재 마을상수도(지하수)를

이용하고 있으나, 지속적인 유입인구 증가와 가뭄시 식수부족 해소 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1월 ~ 2021. 6월

○ 위 치 : 울주군 두동면 은편, 만화, 이전리 일원

○ 규 모 : 배수지 1개소, 가압장 4개소, 관로 21.33km(송수관0.12, 배수관21.21)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,860	-	885	4,118	3,857
국 비
시 도 비	8,860	-	885	4,118	3,857
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2018. 04 23 ~ 10. 20 : 기본 및 실시계획 용역 수행

○ 2018. 11. ~ 12. : 일상감사 및 계약심사

○ 2019. 06. 20 : 공사 계약

□ 향후계획

○ 2019. 08 ~ 09 : 배수지 실시계획인가 협의 및 고시

○ 2019. 10 : 관로부설공사 시행 및 배수지 토지보상 업무 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

효문공단 내부도로 개설공사

담당자

지역개발과 하상수(☎229-4393)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 물동량 수송으로 물류비용 절감 및 기업경쟁력 강화

○ 도시기반시설 확충으로 공단내 산재한 자연마을 및 지역주민 불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2020.

○ 위 치 : 북구 효문․연암동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=2.53㎞, B=15~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	11,500	1,877	1,501	2,005	6,117
국 비
시 도 비	11,500	1,877	1,501	2,005	6,117
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 2015. 8. :  중기지방재정계획 수립

○ 2015. 10. : 지방재정 투자심사(조건부)

○ 2016. 7. 21. : 실시설계용역(보완) 완료

○ 2017. 1. ~ 2. : 일상감사 및 계약심사

○ 2017. 4. 13. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 2. : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 시에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
전시컨벤션센터건립	167,800	10,000	28,000	129,800			10,000	27
대왕암공원 조성	151,677	35,000	10,214	101,721	200	4,542	35,000	80
울산수목원 조성	25,522	9,000	4,209	11,313		1,000	9,000	90
산학융합형 하이테크타운 건립	11,014	11,000		14			11,000	50
율리~삼동간 도로개설	91,478	39,000		52,478			39,000	90
제2 실내체육관 건립공사	55,400	11,000	12,845	31,555			11,000	2

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

전시컨벤션센터건립

담당자

관광진흥과 변종대

(☎229-6031)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전시컨벤션센터 건립을 통한 지역경제 및 수출 활성화를 위한 전시·회의

산업 기반을 구축하고 지역 산업구조 고도화 및 새로운 미래 성장 동력원 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년(5년)

○ 위 치 : KTX울산역 역세권(울주 삼남면 교동리 1683-1번지)

○ 규 모 : 부지 43천㎡, 건축 42.9천㎡(지상 3층, 지하 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  167,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	167,800	46,315	10,120	20,870	90,495
지 방 채	10,000		10,000
국 비	28,000	28,000
시 도 비	129,800	18,315	120	20,870	90,495
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

○ 2017. 12.      : 공사착공

○ 2018. 1.~12.   : 터파기 및 지하층 골조공사

○ 2018. 7.~현재 : 지상1층 골조공사

□ 향후계획

○ 2019. 8.~12. : 지상층 골조공사완료, 미장공사, 창호공사

○ 2020. 1.~12. : 방수공사, 도장공사, 내‧외부 마감공사, 조경공사

○ 2020. 12.    : 공사 준공 및 시험가동(`21. 3 개관)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대왕암공원 조성

담당자

녹지공원과 서정근

(☎229-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새롭게 변화된 문화․여가․관광트랜드의 변화에 따른 관광자원 개발과

시민와 눈높이에 부응하는 자연친화적 여가공간을 조성

○ 2020년 공원실효 대비 토지소유권 확보를 위한 토지보상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2002년 ~ 2022년

○ 위 치 : 울산 동구 방어․일산동 일원

○ 규 모 : 942천㎡(공원시설 : 319천㎡ 녹지시설 : 623천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 151,677백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	151,677	96,677	10,000	27,000	18,000
지 방 채	53,000	-	10,000	25,000	-
국 비	10,214	10,214	-	-	-
시 도 비	83,721	81,721	-	2,000	18,000
시군구비	200	200	-	-	-
기 타	4,542	4,542	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 1962. 05. 14. : 도시관리계획(공원) 결정(국토건설청제149호)

○ 2004. 10. 21. : 공원조성계획 결정(울고 제2004-159호)

○ 2018.  9. 19. : 공원관리동, 주차장, 민자상가, 오토캠핑장, 미로원 등 완료

○ 2019.  7.    : 토지보상 481천㎡ 중 387천㎡(80%)

□ 향후계획

○ 2020. 12.    : 잔여토지보상(51천㎡) 완료

○ 2022. 12.    : 공원조성사업 완료

사업명

울산수목원 조성

담당자

녹지공원과 배도권

(☎052-229-6121)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수목유전자원 증식․보전을 통한 산림생물다양성 확보

○ 산림교육․체험․휴양․치유 프로그램 운영을 통한 산림복지서비스 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2019.

○ 위 치 : 울산 울주군 온양읍 운화리 1320-2번지 일원

○ 규 모 : 20ha

○ 주요시설 : 주차장, 주제원, 산림교육문화센터 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,522백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	25,522	11,454	11,350	2,718
지 방 채	9,000		9,000	0
국 비	5,209	1,500	2,350	1,359
시 도 비	11,313	9,954		1,359
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 2017. 02. 23. : 수목원 조성계획 승인

○ 2017. 08. 18. : 지방재정중앙투자심사 승인(행정안전부)

○ 2018. 01. 25. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 8. : 공사준공, 임시개장(10월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

산학융합형 하이테크타운 건립

담당자

자동차조선산업과 박성호(☎229-3833)

□ 사업목적 및 필요성

○ 조선해양 분야에 ICT기술을 접목, 친환경·경제·안전운항을 실현하여

조선해양산업 고부가가치화 선도 및 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘16. ~ ’20.(5년간)

○ 위 치 : 울산광역시 남구 테크노산업로55번길 16

○ 규 모 : 부지면적 4,192㎡, 건축연면적 10,446㎡(지하 1층, 지상 7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  35,415백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	35,415	10,953	13,754	9,239	1,469
지 방 채	11,000	-	11,000	-	-
국 비	6,799	1,883	2,740	1,374	802
시 도 비	17,616	9,070	14	7,865	667
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `17. 11월 : 실시설계 완료

○ `18.  4월 : 건축 인허가 완료

○ `18. 12월 : 지하 1층 ~ 지상 4층 골조공사(공정율 50%)

○ `19.  7월 : 본관 외벽석공사, 4층 옥상 바닥(공정율 76.25%)

□ 향후계획

○ ‘19. 10월 : 준공예정

○ ‘19. 11월 : 울산정보산업진흥원 및 기업 입주

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설

담당자

종합건설본부 신덕희

(☎229-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 간선도로망 구축으로 교통량 분산 및 지역균형개발 촉진

○ 울주군 청사 율리 이전 및 하늘공원 개장에 따른 접근성 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위    치 : 울주군 청량읍 문수I.C ~ 삼동면 하잠리

○ 사업규모 : 도로개설 L=4.8km, B=20m (터널 1개소, 교량 2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 76,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	76,182	35,168	19,007	22,007
지 방 채	39,000	-	19,000	20,000
국 비
시 도 비	37,182	35,168	7	2,007
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016.  6월 : 상작, 하작구간 보완설계 완료

○ 2016. 11월 : 도로구역 결정고시

○ 2016. 12월 : 공사 착공

○ 2017.  9월 : 상작·하작구간 노체 성토, 터널 굴진

○ 2018.  8월 : 상작교 시공, 율리터널 굴진 완료

○ 2019.  7월 : 토공, 보조기층․암거시공, 교량 및 터널 시공중

□ 향후계획

○ 2019. 11월 : 공사 준공(상작~하작구간)  ※ 전체구간 개통

□ 사업변경 내역(해당시) : “해당없음”

사업명

제2 실내종합체육관 건립사업

담당자

체육지원과 이상수(☎229-3821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산은 17개 시․도 가운데 체육관 시설이 전국 최하위수준으로 전국체전

등 대규모 체육대회․체육행사 유치가능한 국제규격의 실내종합체육관을       건립하여 지역균형발전과 도시경쟁력 제고

○ 기존 동천체육관은 프로농구 전용화로, 종하체육관은 소규모 및 노후화로 인하여 시민 이용에 어려움이 많으므로 실내종합체육관 건립으로 시민의 건강증진과 여가활동을 통한 삶의 질 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2월 ~ 2020. 7월

○ 위 치 : 남구 무거동 산50번지 일원(울산체육공원)

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 부지면적 26,662㎡, 연면적 18,355㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  55,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	55,400	1,116	1,650	7,999	44,635
지 방 채	11,000		2	6,795	4,203
국 비	12,845	1,116	1,390	1,106	9,233
시 도 비	31,555		258	98	31,199
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

○ ‘15.  4. 28.   : 기본계획수립

○ ‘16.  8.  5.   : 중앙투자심사 승인

○ ‘18.  6. 28.   : 중도위 심의 가결

○ ‘18. 10. 20.   : 설계용역 완료

○ ‘19.  3. 28    : 착공(’21. 7월 준공)

○ ‘19.  7. 현재  : 건축기초 파일공사 중

□ 향후계획

○ 공사진행

□ 사업변경 내역(해당없음)

10-3. 민간투자사업

우리 시에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL	울산박물관건립	㈜울산박물관	47,252	35,748	4,721	4,857	48,964	‘11.2.1.~ ’1.1.31.
BTL	’06년 울산광역시 하수관로정비 임대형민자사업	울산청천㈜	90,490	83,234	11,003	11,065	128,469	’11.1.21. ~ ’31.1.20.
BTL	’08년 울산광역시 하수관로정비 임대형민자사업	울주청천㈜	90,531	38,225	10,019	9,470	138,803	’14.3.3.~ ’34.3.2.
BTO	자원회수시설 민간투자사업	울산그린(주)	163,354	142,507	30,200	30,678	305,800	‘12.10.15 ~ ‘27.10.14
BTO	울산광역시 하수슬러지 민간투자사업	울산 에스코㈜	26,051	47,554	7,029	7,439	52,750	’11.1.29.~ ’26.1.8.
BTO	굴화․강동 하수처리시설 민간투자사업	푸른울산㈜	102,551	68,159	14,529	15,497	251,277	’12.9.15. ~ ’32.9.14.
BTO	농소하수처리장 민간투자사업	울산맑은환경㈜	177,689	31,552	17,918	19,209	428,789	’16.2.27. ~ ’36.2.26.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

울산박물관 건립

담당자

울산박물관 조정현 (☎229-4713)

□ 사업목적 및 필요성

○  울산의 문화재를 수집·보존·전시하고 교육·체험을 위한 문화시설 확보

□ 사업개요

○ 기    간 - 공사기간(25개월) : 2009. 1. 2. ~ 2011. 1. 31.

- 운영기간(20년)   : 2011. 2. 1. ~ 2031. 1. 31.

○ 위    치 : 울산광역시 남구 두왕로 277

○ 민간사업자 : ㈜울산박물관

○ 총사업비 : 47,251백만원

○ 사업규모 : 지하1층/지상2층, 1동, 연면적 14,408㎡, 부지면적 33,058㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 20년간 임대료 및 운영비 분할 지급

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	94,290	35,748	4,721	4,857	48,964
국 비	10,423	8,314	1,055	1,054	0
시 도 비	83,867	27,434	3,666	3,803	48,964

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 2031. 1. 31. : 협약종료 및 시설물 인수

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

자원회수시설

담당자

자원순환과

(☎ 229-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성암 소각장 증설 및 매립장 확장으로 위생적이고 안정적인 생활폐기물 처리

○ 매립폐기물 감량화, 소각열을 이용한 자원회수 및 온실가스 감축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 10. 15 ~ 2012. 10. 14.(36개월)

○ 위    치 : 울산 남구 처용로 524

○ 민간사업자 : 울산그린㈜

○ 총사업비 : 163,354백만원(국비 45,930, 민자 117,424)

○ 사업규모 : 매립장조성 158천㎡, 소각장건립 250톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영기간 : 2012. 10. 15 ~ 2027. 10. 14(15년간)

- 운영범위 : 매립장운영(158천㎡) 및 소각장 운영(650톤/일)

- 사업추진 : BTO방식(시설 준공 후 15년간 관리운영권 설정)

※ 최소운영수익보장(MRG) : 없음

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	672,539	305,861	30,200	30,678	305,800
국 비	45,930	45,930
시 도 비	509,185	142,507	30,200	30,678	305,800
시군구비	0	0
기 타	117,424	117,424

□ 추진단계 : 운영중

○ 운영기간 중 생활폐기물 처리량에 따른 사용료 지급

- 2018년 사용료 100,087원/톤

- 기준사용료 : 소비자 물가지수 반영

□ 향후계획

○ 생활폐기물 자원회수시설 효율적 운영 및 감독

사업명

’06년 울산광역시 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수관리과 김병국(☎229-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 합류식 하수관로를 분류식화하여 지하수·방류수역의 오염방지와

하수처리장 처리 효율 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 1. ~ 2031. 1.(공사 2008. 1. ~ 2011. 1./ 운영 2011. 1. ~ 2031. 1.)

○ 위    치 : 동구 전역 및 북구 일원(양정·염포동)

○ 민간사업자 : 울산청천㈜        ○ 총사업비 : 90,490백만원

○ 사업규모 : 하수관 129.6km, 배수설비 11,288개소 정비 등

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 준공 후 20년간 관리운영권 설정, 시설임대료 5년 주기 수익률 조정

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	233,771	83,234	11,003	11,065	128,469
국 비	49,928	18,746	2,388	2,388	26,406
시 도 비	183,843	64,488	8,615	8,677	102,063
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(2011. 1. 21. ~ 2031. 1. 20.)

□ 향후계획

○ 2021. 1. 21. : 시설임대료 수익률 조정 예정(2차)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

’08년 울산광역시 하수관로정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수관리과 김병국(☎229-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 합류식 하수관로를 분류식화하여 지하수·방류수역의 오염방지와

하수처리장 처리효율 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 9. ~ 2034. 3.(공사 2010. 9. ~ 2014. 3./ 운영 2014. 3. ~ 2034. 3.)

○ 위    치 : 울주군 언양·상북·삼남·삼동·온양읍 일원

○ 민간사업자 : 울주청천㈜        ○ 총사업비 : 90,531백만원

○ 사업규모 : 하수관 156.9km, 배수설비 7,515개소 정비 등

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 준공 후 20년간 관리운영권 설정, 시설임대료 5년 주기 수익률 조정

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	196,517	38,225	10,019	9,470	138,803
국 비	113,660	23,183	6,052	5,643	78,782
시 도 비	82,857	15,042	3,967	3,827	60,021
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(2014. 3. 3. ~ 2034. 3. 2.)

□ 향후계획

○ 2024. 3. 3. : 시설임대료 수익률 조정 예정(2차)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

농소하수처리장 민간투자사업

담당자

하수관리과 이선우(☎229-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중구와 북구 농소지역의 급속한 개발로 인한 하수 발생량 급증으로 용연 및 방어진하수처리장의 처리용량 한계로 하수처리장 신설

□ 사업개요

○ 기      간 : 2009. 5. ~ 2016. 2.(공사 2009. 5. ~ 2016. 2./ 운영 2016. 2. ~ 2036. 2.)

○ 위      치 : 북구 시례새터길 190

○ 민간사업자 : 울산맑은환경㈜/롯데건설 외 5개사

○ 총사업비 : 177,689백만원(‘09년 3월 1일 불변가격 기준)

○ 사업규모 : 100천㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 시설운영 20년간

○ 지금까지 재정부담액(사용료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	497,468	31,552	17,918	19,209	428,789
국 비
시 도 비	497,468	31,552	17,918	19,209	428,789
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2016. 2. 27. ~ 2036. 2. 26.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

하수슬러지 민간투자사업

담당자

하수관리과 임정호(☎229-3292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 효율적인 하수처리시설의 운영을 통해 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 처용로 524

○ 시설용량 : 300톤/일(150톤/일×2기)

○ 사업기간 : 2006. 5. ~ 2026. 1.(공사 2006. 5. ~ 2011. 1./ 운영 2011. 1. ~ 2026. 1.)

○ 총사업비 : 26,051백만원(‘06년 1월 1일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 울산에스코㈜/한솔이엠이㈜ 외 2개사

※ 운영사 : 울산에스코㈜(운영기간 : 15년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 15년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	114,772	47,554	7,029	7,439	52,750
국 비
시 도 비	114,772	47,554	7,029	7,439	52,750
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2011. 1. 9. ~ 2026. 1. 8.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

굴화·강동 하수처리시설 민간투자사업

담당자

하수관리과 이선우(☎229-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수발생량 증가에 따른 하수처리장 신설로 처리구역 내 발생되는 하수의 완벽한 처리를 통해 방류수역의 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 울주군 범서읍 울밀로 2793-24, 북구 산하동 산음3길 32

○ 사업개요 : 47천㎥/일, 5천㎥/일, 하수관로 5.62km, 44.88km

○ 사업기간 : 2010. 3. ~ 2032. 9.(공사 2010. 3. ~ 2012. 9./ 운영 2012. 9. ~ 2032. 9.)

○ 총사업비 : 102,551백만원(‘06년 2월 28일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 푸른울산㈜/롯데건설

※ 운영사 : 푸른울산㈜ (운영기간 : 20년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 20년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	349,462	68,159	14,529	15,497	251,277
국 비
시 도 비	349,462	68,159	14,529	15,497	251,277
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2012. 9. 15. ~ 2032. 9. 14.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급