109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 시에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
청소년문화회관	21,972	-	-	1,027	20,945	2022	2019	8%
산업시설 유틸리티성 자원공유 지원사업	9,900	0	2,750	2,200	4,950	2023	2019	28%
VR/AR 제작거점센터 구축	6,755	3,795	1,780	1,180	0	2020	2019	83%
제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립	21,000	0	0	1,300	19,700	2022	2019	6.19%
울산 만명 게놈프로젝트	18,630	6,800	4,000	7,830	-	2020	2017	70%
전기차 폐배터리 재활용 산업육성을 위한 기반구축 사업	15,644			6,048	9,596	2022	2019
해수자원화기술 연구센터	18,442	3,087	9,317	6,038	-	2020	2019	100%
매곡천~동대초교 도로개설공사	20,000	-	4,000	2,000	14,000	2022	2019
범서하이패스IC~ 천상하부램프 도로확장공사	12,100	-	2,500	1,500	8,100	2021	2019
선바위~망성 도로개설	24,700	-	-	-	24,700	2024	2019
전선 지중화 사업 (대학로)	12,000	0	0	0	12,000	2023	2019	5%
차세대 지능형교통체계 (C-ITS) 실증사업	25,000		8,333	8,333	8,334	2021	2019	30%
특수화학구조대	10,800			3,300	7,500	2023	2019	5%
울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비사업	49,730	930	2,202	13,904	32,694	2022	2017, 2019	-
울산국제영화제	3,657	-	157	700	2,800	연중실시	2019	33%
울산프롬나드 페스티벌	1,783		583	600	600	계속	2019	100%
미세먼지 차단숲 조성사업	9,000	-	-	9,000	-	2020	2019	13.8%
태화강역 광장 개선사업	8,700	-	134	1,066	7,500	2021	2019	4%
공관어린이집 복합개발사업	17,900	3,600	3,600	8,211	6,089	2021	2019	5%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘19년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

청소년문화회관

담당자

여성가족청소년과

최일석(☎229-3792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 접근성을 고려한 최적의 부지에 청소년의 끼와 재능을 마음껏 펼치고 다양한 문화･체험활동을 통한 창의력향상 전용공간 필요

○ 4차 산업혁명 시대 청소년 인재육성･활동･직업체험 등 구심점 역할을 수행할 청소년정책 컨트롤 타워 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 중구 만남의거리 14

○ 규 모 : 지하 2층, 지상 9층(연면적 9,200㎡, 부지면적 1,150㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,972백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,972	0	0	1,027	20,945
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	21,972	0	0	1,027	20,945
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  8%)

○ ‘19. 12월 : 청소년문화회관 기본계획 수립

○ ‘20.  5월 : 설계공모

□ 향후계획

○ ‘20. 9월 : 설계 공모작 선정 및 실시설계

○ ‘21년 ~ ‘22년 : 착공 및 준공(최단공기 적용 시)

사업명

유틸리티성 자원공유 지원사업

담당자

미래신산업과 이상규(☎229-6913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중소기업이 투자효율이 낮아 개별적으로 구축하기 어려운 유틸리티성 자원(안전/설비 관리 시스템)을 산업단지 차원에서 공동 사용 할 수 있도록 지원하여 중소기업의 생산성 향상 및 국제경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 지원대상 : 울산지역 산업단지 내 중소화학기업(200여개)

○ 위 치 : 울산종합비즈니스센터(학남산업단지 內) ※ 전용면적 230㎡ 임차

○ 주관부처 : 중소벤처기업부 / 중소기업기술정보진흥원

○ 추진기관 : 울산시 / (주관)울산정보산업진흥원, (참여)울산대학교

○ 주요내용

- (서비스 구축) 유틸리티성 자원공유 서비스 구축(9종)

- (기업지원) 유틸리티성 자원공유 지원센터 구축 및 기업지원

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간) ※ 1차년도 : ’19. 6. 1. ~ ’20. 3. 31.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,900		2,750	2,200	4,950
국 비	4,900		1,250	1,250	2,400
시 도 비	5,000		1,500	950	2,550
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 법정의무 안전보건관리 시스템 1차년도 구축완료

○ 가압장 펌프 설비예지보전시스템 1차년도 구축완료

○ 정량적 위험성 평가시스템 1차년도 구축완료

□ 향후계획

○ 법정의무 안전보건관리 시스템 구축 추진

○ 가압장 펌프 설비예지보전시스템 구축 추진

○ 정량적 위험성 평가시스템 구축 추진

사업명

울산 VR/AR 제작지원센터

구축 사업

담당자

미래신산업과

서종현(☎229-6472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고용위기지역 울산 동구에 지역 특화산업과 가상·증강현실(VR/AR)

기술을 융합하는 신산업창출의 거점을 조성

○ 신산업 창출을 통한 퇴직자, 청년의 창·취업 일자리창출 및 우수 VR/AR

개발인력 정주요건 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10.～2020. 12.

○ 위 치 : 울산광역시 동구 보성길 73

○ 규 모 : 부지 1,578㎡, 연면적 990㎡(지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,755백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,755	3,795	1,780	1,180	-
국 비
시 도 비	2,850	1,800	650	400	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	3,905	1,995	1,130	780	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

○ ‘18.  9. : 2018년도 국가예산 반영

○ ‘18. 10. : 시 공유재산 취득 심의 완료

○ ‘19.  9. : 센터 준공   ※ 2019. 11. 4. 개소식

○ ‘20.  4. : 등기이전 완료

□ 향후계획

○ ‘20. 8.～ : 인력양성 사업추진, 콘텐츠 개발 및 사업화 추진

사업명

제조서비스융합 중소벤처 지식산업센터 건립

담당자

미래신산업과 이상규(☎229-6913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 주력산업 위기로 일자리 감소, 실업률 증가 등 지역 내 경기가 급속히 악화되어 대책 마련 시급

○ 제조업 중심 산업구조를 다변화하고 제조업과 서비스업 간 융합을 통한 주력산업의 고도화 및 신산업 육성으로 미래 성장동력 창출

○ 제조업의 서비스화를 지원할 수 있는 인프라 구축으로 경쟁력 있는 중소벤처기업 육성 및 지원을 통해 청·장년 일자리 창출 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

○ 위    치 : 울산광역시 중구 성남동 219-10 (구. 중부소방서)

○ 총사업비 : 210억원(국 135, 시 75)  ※ 부지별도

○ 규    모 : 지하 2층, 지상12층(부지면적 1,494㎡, 연면적 11,600㎡)

○ 주요내용 : 소규모 벤처 및 관련기관 집적센터 구축

- (기반구축) 입주공간(40개 정도), 지원시설(회의실, 홍보실, 공용장비실) 등

- (기업지원) 중소벤처 대상 사업화 전주기 지원 시스템 구축

○ 건립기관 : 울산광역시(종합건설본부)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	21,000			1,300	19,700
국 비	13,500			1,000	12,500
시 도 비	7,500			300	7,200
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.19%)

○ ‘20. 5. : (구)중부소방서부지 공공건물 건립 계획 수립

○ ‘20. 6. ~ 9. : 설계공모

□ 향후계획

○ ‘20. 9. ~ ’21. 6. : 실시설계

○ ‘21. 11. ~ ’22. 12. : 공사 착공 ~ 준공(예정)

사업명

울산 만명 게놈프로젝트

담당자

화학소재산업과 김경옥

(☎229-7681)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오헬스산업의 핵심 기술인 유전체(게놈) 연구를 통해 신성장동력 확보 필요

○ 리딩 국가 대열 합류 및 글로벌 시장 선점을 위해 최소 1만명 이상의 한국인 게놈프로젝트 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ～ 2020년

○ 위 치 : UNIST내

○ 규 모 : 1만명 한국인 게놈 해독․분석

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,630	6,800	4,000	7,830	-
국 비	8,100	3,700	1,900	2,500	-
시 도 비	8,200	3,100	2,100	3,000	-
시군구비	-			-
지 방 채	-			-
민간자본	2,330			2,330
기 타	-			-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 게놈산업기술센터 확장 개소 : 2017. 6. 19., UNIST 제4공학관(110동)

○ 한국인 표준 게놈 서열(KOREF) 고도화

○ 다중오믹스(게놈, 후성유전체, 전사체, 단백질체, 대사체 등) 융합 기술 및 바이오마커 개발, 질병예측 시스템 기술 보유

○ 게놈 분석 리포트 자동화 시스템 구축

○ 한국인 전장게놈 해독․분석 : ‘19년까지 4,000명, ’20년 6,000명

□ 향후계획

○ ‘20년 ~ : 6천명 한국인 전장 게놈 해독․분석

□ 사업변경 내역(해당시)

당 초	변 경
▪ 전장 개놈 해독 : 2천명(‘17∼’18) ▪ 선택적(부분) 게놈 해독 : 8천명(‘19) ▪ 사업기간 : 2017∼2019 ▪ 사 업 비 : 108억원(국56, 시52)	▪ 전장 개놈 해독 : 1만명 ※선택적(부분) 게놈 해독(폐지) ▪ 사업기간 : 2017∼2020(1년 연장) ▪ 사 업 비 : 186억원(국81, 시82, 민 23)

사업명

전기차 폐배터리 재활용 산업

육성을 위한 기반구축 사업

담당자

화학소재산업과 이명화

(☎229-7672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전기차 사용배터리의 발생량 급증(‘19년 1,464대→’22년 9,155대, 연평균

150%성장)이 예상됨에 따라 폐배터리 활용 Value Chain 확보 및 폐배터리

유통 프로세스* 확립

* 프로세스 : 폐배터리 수거→분해→선별→평가→효율별 재조립→Reuse 배터리 생산

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 4. ~ 2022. 12(33개월)

○ 위    치 : 종합비즈니스센터內(연면적 : 2,314㎡)

○ 주요내용 : 전기차 사용배터리 재사용 플랫폼 기반 센터건축, 장비구축,

기술지원, 인력양성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○  총사업비 : 15,146백만원(국 8,277, 시 6,750, 민(현물) 119)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년
계	15,146	5,787	5,634	3,725
국 비	8,277	2,554	3,178	2,545
시 비	6,750	3,200	2,413	1,137
민 자	119	33	43	43

□ 추진상황(계획)

○ ‘19. 4. 30 : ’20년 지역산업거점기관지원 적합사업 선정(산업부)

○ ‘20. 4. 16 : ’20년 스마트특성화기반구축사업 결과 통보(산업부)

○ ‘20. 6. 11 : 과제수행기관 전자협약 ※ 전담(kiat)·주관(TP) 및 참여기관 3개

○ ‘20. 8. ~  : 센터 건축 실시설계, 장비구입심의위원회 개최 등

□ 기대효과

○ 전기차 사용배터리 재사용 플랫폼을 구축하여 내륙거점기반을 확보,

사용배터리 재사용 용도별 제품군 발굴을 통한 산업 육성 및 지역

경제 활성화

사업명

해수자원화기술 연구센터

담당자

화학소재산업과 이명화

(☎229-7672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중장기적 에너지 수요에 선제적으로 대응하고, 사업화 조기 실현을

위한 연구개발 실증사업 추진

○ UNIST가 세계 유일 원천기술을 보유한 해수전지 대용량 전지개발

실증화와 담수화 실증 목적의 연구 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기간/위치 : ’18년 ~ ’20년(3년간) / UNIST 內

○ 건립규모 : 부지 5,701.93㎡, 연면적 5,443.49㎡ (지상 5층, 지하 1층)

구분	용 도
5층	공조실, 기계실
4층	광전환효율실, 나노소자공정실, 소자제작실험실 등
3층	항온항습기계실, 특수실험실 등
2층	담수화 전극 연구실, 담수화 플랜트 설계 및 모델링 연구실 등
1층	해수탱크실, 행정실, 홍보관, 드라이룸 등
지하 1층	발전기실, 회의실 등

○ 총사업비 : 18,842백만원(국 11,819, 시 4,400, 민 2,623)

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비	2018년	2019년	2020년
계	18,442	3,087	9,317	6,038
국비	11,819	1,764	7,017	3,038
시비	4,000	-	1,000	3,000
민자	2,623	1,323	1,300	-

□ 추진상황(계획)

○ '18.  4. ~ 8. : 기본 및 실시설계 시행

○ ‘19.  2. : 공사 착공

○ ‘20.  7. : 준공, ※ 준공식 9월중 예정

□ 기대효과

○ 해수전지 기술 개발과 연계되는 해수담수화 기술확보를 통해 획기적

에너지 절감형 해수담수화 플랜트 구축

사업명

매곡천~동대초교 도로개설공사

담당자

건설도로과 강용관(☎4091)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신천지구와 매곡지구를 연결하는 중심축으로서, 도심의 원활한 차량소통과 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 북구 매곡천 ~ 동대초교(대로3-55)

○ 규 모 : 도로 개설 L=0.16㎞, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000	-	4,000	2,000	14,000
국 비
시 도 비	20,000	-	4,000	2,000	14,000
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ '19.  6. : 지방재정 투자심사 완료

○ '19.  6. : 특별교부금 20,000백만원 교부 신청 및 교부(북구 ↔ 예산담당관)

○ '19.  9. : 실시설계 용역 착수(북구) ※ 완료 ‘19. 12.

○ '19. 12. : 시비보조금 20,000백만원 교부(건설도로과 → 북구)

○ '20.  2. : 매곡천~동대초교 도로개설 추진계획 수립(보상-북구, 공사-종건)

○ '20.  3. : 보상업무 위․수탁 협약(시↔북구)

○ '20.  5. : 실시계획 고시

□ 향후계획

○ ‘20.  7.~ : 보상(북구) 및 공사시행(종합건설본부)

사업명

범서하이패스IC~ 천상하부램프

도로확장공사

담당자

건설도로과 강용관(☎4091)

□ 사업목적 및 필요성

○ 범서하이패스 IC 개통과 연계 범서 주거밀집지역 접근성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.

○ 위 치 : 울주군 범서읍사무소 일원(중로1-89)

○ 규 모 : 도로 확장 L=1.0㎞, B=8→20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,100	-	2,500	1,500	8,100
국 비
시 도 비	12,100	-	2,500	1,500	8,100
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ ‘19.  2. : 실시설계 용역 착수(건설도로과)

○ ‘19.  3. : 2019년 제1차 투자심사 완료(6,600백만원)

○ ‘19.  8. : 2019년 제3차 투자심사 완료(12,100백만원)

○ ‘19. 11. : 실시설계용역 완료 (건설도로과)

○ ‘20.  2. : 실시계획고시  ※ 업무이관(건설도로과 → 종합건설본부)

○ ‘20.  4. : 공업용수관로 이설협의(한국수자원공사)

○ ‘20.  6. : 사업구간 토지분할

□ 향후계획

○ ‘20.  7.~ : 보상업무(물건조사, 보상계획 공고 등) 추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비(실시설계 결과 반영 → 공사비 5,500백만원 증액)

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	공사비	보상비	기타	비고
당초	6,600	2,500	4,000	100
변경	12,100	8,000	4,000	100	실시설계 결과 공사비 5,500백만원 중액

사업명

선바위~망성 도로개설

담당자

건설도로과 강용관(☎4091)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선바위공원 인접 도로 개설하여 굴곡부 위험구간 선형을 개량 교통안전확보

○ 노후 교량인 망성교(C등급) 재가설 및 도시공원(선바위공원) 조성 간섭 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.

○ 위 치 : 울주군 범서읍 입암리(선바위교)~망성리(대로1-15)

○ 규 모 : 도로확장 L=1.2km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	24,700	-	-	-	24,700
국 비
시 도 비	24,700	-	-	-	24,700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ ‘19.  8. : 2019년 제3차 투자심사 완료(24,700백만원)

○ '20.  6. : 장기미집행 도시계획시설 실시계획 고시

□ 향후계획

○ '21.  1. : 실시설계용역 시행

사업명

전선 지중화 사업 (대학로)

담당자

건설도로과 우영걸(☎7653)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로변 무질서하게 난립된 가공전기‧통신선로를 지중이설하여 보행 환경 개선, 안전사고예방 및 쾌적한 가로경관 조성

○ 신복로터리에서 대학교, 문수체육공원, 국도7호선에 연결되는 대학로 미관개선 및 지중화율이 가장 낮은 대도시 이미지 탈피 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 울산시 남구 무거동(신복로터리 ~ 울산대학교 ~ 무거삼거리)

○ 규 모 : 대학로 전선‧통신선 지중화 L=2.85km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,000				12,000
국 비
시 도 비	6,400				6,400
시군구비
지 방 채
민간자본	5,600				5,600
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ ‘13. 6. : 시가지 간선도로 지중화 중장기계획 수립(2014~2030)

○ ‘18.11. : 2019년 울산시 중기지방재정계획 반영

○ ‘19.12. : 2019년 지중화사업 선정(한국전력공사, 신복로타리~울산대학교)

□ 향후계획

○ ‘20. 9. : 지중화 협약

○ ‘21. ~ ’23. : 사업비 확보 시 사업시행

사업명

차세대 지능형교통체계(C-ITS) 실증사업

담당자

교통기획과 이상희(☎229-4274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자율주행차, 커넥티드카 등 변화하는 교통환경에 부응하는 교통서비스 제공

○ 교통사고 감소, 고품격 교통정보서비스 제공 및 관련산업 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 이예로, 오토밸리로, 산업로 등 142.6km

○ 규 모 : V2X 통신인프라 구축, 차량단말기 2,700대 배포, 교통안전 서비스 개발 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	25,000	-	8,333	8,333	8,334
국 비	15,000	-	5,000	5,000	5,000
시 도 비	10,000	-	3,333	3,333	3,334
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 04. : C-ITS 실증사업 업무협약 체결(국토부) : ‘19. 4.

○ 2019. 08. : C-ITS 실증사업 기본설계 추진 : ‘19. 8.

○ 2019. 12. : C-ITS 실증사업 계약 : ‘19. 12.

○ 2020. 07. : 현장 인프라(RSU, 검지기 등) 설치 : ‘20. 7.

□ 향후계획

○ 2020. 08. : 1차년도 구축사업 준공

○ 2020. 09. : 2차년도 사업추진 및 서비스 개발

○ 2021. 05. : 3차년도 사업추진 및 준공

○ 2021. 12. : 사업준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

특수화학구조대

담당자

소방행정과 김신규(☎4533)

□ 사업목적 및 필요성

○ 특수화학구조대 독립청사 신축으로 차고 및 훈련공간 확보

○ 재난환경 변화에 따른 특화된 재난대응 전담출동대 운영

○ 훈련시설 구축을 통해 석유화학 콤비나트 안전관리 역량강화

○ 재난 초기대응을 위해 현장종사자 등 민간훈련 병행추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 울산광역시 남구 부곡동 산110번지 외 13필지

○ 사업기간 : 2020년 ～ 2022년

○ 사 업 량 : 부지면적 42,135㎡, 1개동(지상 4층), 연면적 3,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,800백만원(공사비96, 용역비12)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	10,800			3,300	7,500
국 비
시 도 비	10,800			3,300	7,500
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 도시관리계획 결정고시 : 2020. 7.9

○ 건축설계공모 및 용역계약 : 2020.10. ~ 2021.4.

□ 향후계획

○ 공사착공 : ‘21년 상반기

○ 준공 및 운영 : ‘21년 ~ ’23년

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

울산역 복합환승센터 주변 기반시설 정비사업

담당자

종합건설본부 남성민

(☎229-5861)

□ 사업목적 및 필요성

○ 역세권의 원활한 진·출입 및 언양 도심 교통혼잡 해소

○ 울산 서부권 지역개발 촉진 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2022년

○ 위 치 : 울산역(복합환승센터)~국도35호선(서울산 TG)

○ 규 모 : 도로개설 L=0.92km, B=25~30m(지하차도 L=0.56Km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,730백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	49,730	930	2,202	13,904	32,694
국 비	14,900			3,000	11,900
시 도 비	34,830	930	2,202	10,904	20,794
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2017.  6월 : 중앙투자심사(L=0.27km, B=25~30m, 367억) 조건부 승인

○ 2018. 12월 : 실시설계용역 완료

○ 2019. 11월 : 소규모환경영향평가 협의 완료

○ 2019. 12월 : 중앙투자심사(L=0.92km, B=25~30m, 497억) 조건부 승인

□ 향후계획

○ 2020.  7월 : 공사 및 감리 업체선정

○ 2020.  8월 : 공사착공

□ 사업변경 내역

○ 당초(2017년) : L=0.27km, B=25m~30m, 사업비 367억원

○ 변경(2019년) : L=0.97km, B=25m~30m, 사업비 497억원

사업명

울산국제영화제 추진

담당자

문화예술과 김성호(☎7981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영화신인들의 등용문 역할을 하고 영화 콘텐츠를 통해 인간과 자연이 공존하는 도시 울산을 세계에 소개

○ 다양한 지역축제를 융합하는 빅텐트 복합문화축제로서의 내실있는 시민참여형 국제영화제 개최

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 12월말

○ 장    소 : 울산문화예술회관 및 관내 영화관

○ 주요내용

- 울산국제영화제 공모선정작 26편 상영

- 시민참여형 부대행사 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,657백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,657	-	157	700	2,800
국 비
시 도 비	2,957	-	157	700	2,100
시군구비
지 방 채
민간자본	700				700
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 기본계획 수립 연구용역 추진(2019. 4. 5. ~ 9. 1.)

○ 용역 최종보고회 및 제4차 자문위원회(2019. 8. 26.)

○ 울산국제영화제 종합추진계획 수립(2020. 2. 12.)

○ 울산국제영화제 영화제작지원사업 대상 선정(2020. 6. 1. ~ 7. 30.)

□ 향후계획

○ 울산국제영화제 프레 페스티벌 개최 : 2020. 12월 중

○ 독립 추진기구 설치 준비 : 2021년

사업명

울산프롬나드 페스티벌

담당자

문화예술과 구도이

(☎229-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민 중심의 참여형 축제 개최를 통해 만족도 및 인지도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘19. 9. 20. ~ 9. 22.

○ 장 소 : 태화강국가정원

○ 주요내용

- 공연 프로그램 : 35개 작품(개ㆍ폐막작, 공식초청 11, 프린지 22)

※ 해외 11개팀, 국내 25팀 등 국내ㆍ외 수준 높은 공연팀 참여

- 기획 프로그램 : 청년문화, 체험, 플리마켓, 시민예술가 등 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,783백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,783		583	600	600
국 비
시 도 비	1,783		583	600	600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(제1회 행사 개최(진도 : 100%) - 연례반복)

○ 다양한 거리예술공연, 시민 참여 퍼레이드, 버스킹 공연을 통한 휘게(hygge) 실현과 예술향유 기회제공

○ 거리예술에 대한 시민 인지도 제고

□ 향후계획

○ 2020년도 제2회 행사 추진

- 가을(‘20. 11. 14. ~ 15.)과 겨울(’20. 12. 5.) 2회차 공연으로 계절에 적합한 주제로 시민참여형 축제 추진

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

녹지공원과 배도권(☎229-3322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가산단에서 발생하는 대기오염물질이 생활권으로 유입되는 것을 차단할 수 있는 숲 조성으로 지역주민의 생활환경 개선 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 울산미포국가산업단지(연암지구), 온산국가산업단지(온산지구) 등

○ 규 모 : 11.2ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	-	-	9,000	-
국 비	4,500	-	-	4,500	-
시 도 비	4,500	-	-	4,500	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13.8%)

○ 온산지구 : 실시설계 완료(‘19.12.), 공사착공(’20.6.)

○ 연암지구 : 실시설계 완료(‘20.6.), 발주준비(지방비 매칭액 미확보-1,500백만원)

□ 향후계획

○ 온산지구 공사완료 : ‘20. 11.

○ 연암지구

- 추경예산에 시비 1,500백만원 확보

- 공사완료 : ‘20. 12.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

태화강역 광장 개선사업

담당자

녹지공원과 이동수(☎229-3323)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복선전철 태화강역 신축에 따른 교통체계 개선, 광장 내 시설 노후화 및 주변경관 등을 고려한 광장 개선 사업을 통한 이용객 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 울산 남구 삼산동 태화강역 일원

○ 규 모 : 52천㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,700	-	134	1,066	7,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	8,700	-	134	1,066	7,500
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ ‘19. 5. ~ ’20. 6 : 재해·환경영향평가

○ ‘19. 5. ~ ’20. 8 : 기본 및 실시설계용역

□ 향후계획

○ ‘20. 9. ~ ’20. 12. : 실시계획 협의 및 사업 고시

○ ‘21. 1. ~ ’21. 12. : 공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

당 초	현 재	비 고
2020. 1. ~ 2020. 12.	2020. 1. ~ 2021. 12.	· 버스회차시설 이전 · 실시계획 협의

사업명

공관어린이집 복합개발사업

담당자

건축주택과 김종경

(☎229-6962)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 공공청사 복합개발을 통해 공공서비스 향상 및 도심활성화

○ 지역 내 젊은층, 고령자 등 주거 취약계층에 저렴함 임대주택 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘18. 1. ~ ’21. 12.(4년간)

○ 위 치 : 울산광역시 남구 월평로 21번길 19(현 공관어린이집)

○ 규 모 : 어린이집(100명), 공영주차장(87대), 행복주택(100호)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,900	0	3,600	8,211	6,089
국 비	5,788	-	1,300	2,088	2,400
시 도 비	1,412	-	-	1,123	289
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기금융자	4,600	-	2,300	1,100	1,200
기타(LH)	6,100	-	-	3,900	2,200

□ 추진상황

○ 기초 터파기 공사 중(공정률 5%)

□ 향후계획

○ ‘21. 12. : 사업준공 및 입주

10-2. 지방채 발행사업

우리시에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
전시컨벤션센터건립	167,800	10,000	28,000	129,800			10,000
상개~매암 혼잡도로 개선사업	90,747	11,000	38,345	41,402			5,000	86
율리~삼동간 도로개설	74,927	39,000	-	35,927	-	-	39,000	100
시립미술관 건립	16,147	10,000	5,417	1,000			10,000	37
대왕암공원 조성	151,677	45,000	10,214	91,721	200	4,542	35,000	84

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

전시컨벤션센터건립

담당자

관광진흥과 변종대

(☎229-6031)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전시컨벤션센터 건립을 통한 지역경제 및 수출 활성화를 위한 전시·회의

산업 기반을 구축하고 지역 산업구조 고도화 및 새로운 미래 성장 동력원 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2020년(5년)

○ 위 치 : KTX울산역 역세권(울주 삼남면 교동리 1683-1번지)

○ 규 모 : 부지 43천㎡, 건축 42.9천㎡(지상 3층, 지하 1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  167,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	167,800	56,435	30,870	70,095	10,400
지 방 채	10,000		10,000
국 비	31,500	28,000	3,500
시 도 비	126,300	28,435	17,370	70,095	10,400
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 73%)

○ 2017. 12.    : 공사착공

○ 2018. 1.~12. : 터파기 및 지하층 골조공사

○ 2019. 12.    : 지상층 골조공사 완료

□ 향후계획

○ 2020. 1.~12. : 내‧외부 마감공사, 방수공사, 도장공사, 조경공사

○ 2021. 1.	: 공사 준공 및 시험가동(`21. 3 개관)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

상개~매암 혼잡도로 개선공사

담당자

종합건설본부 조재호

(☎229-5853)

□ 사업목적 및 필요성

○ 두왕사거리 교통체증 완화와 석유화학단지 원활한 산업물동량 수송

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남구 선암동 감나무진사거리 ~ 명동삼거리

○ 규 모 : 도로개설 L=3.46km, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 90,747백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	90,747	51,762	20,088	16,170	2,727
지 방 채	11,000		5,000	6,000
국 비	38,345	25,173	3,397	8,454	1,321
시 도 비	41,402	26,589	11,691	1,716	1,406
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ 2012.  1월 : 제2차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업 기본계획 수립

○ 2013.  9월 : 예비타당성 조사

○ 2015.  5월 : 기본 및 실시설계

○ 2016.  3월 : 선형조정(노선 수정) 확정

○ 2017.  3월 : 착공

○ 2019. 12월 : 시‧종점부 교량 및 터널 시공 중

□ 향후계획

○ 2020.  6월 : 시‧종점부 교량 및 터널 시공 완료

○ 2021.  2월 : 준공 및 개통

사업명

율리~삼동간(상작, 하작구간) 도로개설

담당자

종합건설본부 배웅규

(☎229-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 간선도로망 구축으로 교통량 분산 및 지역균형개발 촉진

○ 울주군 청사 율리 이전 및 하늘공원 개장에 따른 접근성 향상

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

○ 위    치 : 울주군 청량읍 문수I.C ~ 삼동면 하잠리

○ 사업규모 : 도로개설 L=4.8km, B=20m (터널 1개소, 교량 2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 74,927백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	74,927	54,175	20,752	0	0
지 방 채	39,000	19,000	20.000
국 비
시 도 비	35,927	35,175	752
시군구비
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  6월 : 상작, 하작구간 보완설계 완료

○ 2016. 11월 : 도로구역 결정고시

○ 2016. 12월 : 공사, 감리 착공

○ 2018. 12월 : 상작교, 율리터널 굴착, 하작교 시공 완료

○ 2019. 12월 : 본선 포장완료 및 구조물공(터널, 교량) 완료

□ 향후계획

○ 2020.  3월 : 공사(상작~하작구간) 준공 및 사용개시

○ 2020. 5~10월 : 도로사업 준공후 공사관리(확정측량, 지적정리 등) 추진

사업명

울산시립미술관 건립공사

담당자

시립미술관추진단 김경  (☎229-8431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 오랜 숙원 사업인 시립미술관을 건립으로 시민 문화공간 제공

○ 울산시민의 오랜 숙원 사업인 시립미술관 건립으로 시민 문화공간 제공 및 21세기 문화경제 시대에 대비한 문화 도시 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기    간 :  2012. 9. ∼ 2021. 12.

○ 위    치 : 중구 북정동 1-3번지 외 5필지/6,182㎡

○ 규    모 : 지하3층/지상2층 , 건축연면적 12,770.57㎡

○ 사업내용 : 전시실, 수장고, 다목적홀, 자료실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 65,897백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	65,897	16,444	2,057	31,830	15,566
지 방 채	3,000			3,000
국 비	13,845	2,790	1,574	9,481
시 도 비	49,052	13654	483	19,349	15,566

□ 추진상황(공정률 : 37%)

○ 2012.  9. 13. : 시립미술관 건립부지 확정(구․울산초교 일원)

○ 2016.  7.  4. : 시립미술관 건립부지 확정(중부도서관 및 북정공원)

○ 2017.  3. 22. : 실시설계 완료

○ 2019.  1. 21. : 조달청 건축공사 공사발주 요청

○ 2019.  7월   : 시공사 선정(화성건설)

○ 2019.  8. 13. : 공사착공(현 공정율 : 37%)

□ 향후계획

○ 2021. 8. 11 : 공사 준공

○ 2021. 8. ~ 12. : 미술관 개관 사전 준비 및 개관

사업명

대왕암공원 조성

담당자

녹지공원과 김민식(☎229-3332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새롭게 변화된 문화․여가․관광 트랜드의 변화에 따른 관광자원 개발과

시민의 눈높이에 부응하는 자연친화적 여가공간 조성

○ 2020년 공원실효 대비 토지소유권 확보를 위한 토지보상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2002년 ~ 2022년

○ 위 치 : 울산 동구 방어동․일산동 일원

○ 규 모 : 942천㎡(공원시설 : 319천㎡, 녹지시설 : 623천㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 151,677백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	151,677	106,677	35,000	4,000	6,000
지 방 채	45,000	10,000	25,000	4,000	6,000
국 비	10,214	10,214	-	-	-
시 도 비	91,721	81,721	10,000
시군구비	200	200	-	-	-
기 타	4,542	4,542	-	-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

○ 1962. 05. 14. : 도시관리계획(공원) 결정(국토건설청 제149호)

○ 2004. 10. 21. : 공원조성계획 결정(울고 제2004-159호)

○ 2018.  9. 19. : 공원관리동, 주차장, 민자상가, 오토캠핑장, 미로원 등 완료

○ 2019.  1.~12. : 토지 일부 보상(481천㎡중 406천㎡)

□ 향후계획

○ 2020. ~ : 잔여토지보상 완료 및 공원조성사업 시행

10-3. 민간투자사업

우리시에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총 사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL	’06년 울산광역시 하수관로정비 임대형민자사업	울산청천㈜	90,490	94,237	11,057	11,131	116,664	’11.1.21. ~ ’31.1.20.
BTL	’08년 울산광역시 하수관로정비 임대형민자사업	울주청천㈜	90,531	48,244	9,466	9,397	127,793	’14.3.3.~ ’34.3.2.
BTL	울산박물관 임대형 민간투자사업	㈜울산 박물관	47,252	40,393	4,857	4,898	52,169	20년
BTO	자원회수시설 민간투자사업	울산그린 (주)	163,354	172,707	29,045	27,802	277,998	‘12.10.15 ~ ‘27.10.14
BTO	울산광역시 하수슬러지 민간투자사업	울산 에스코㈜	26,051	54,583	6,971	7,445	37,225	’11.1.29.~ ’26.1.8.
BTO	굴화․강동 하수처리시설 민간투자사업	푸른울산㈜	102,551	82,688	15,311	16,363	236,999	’12.9.15. ~ ’32.9.14.
BTO	농소하수처리장 민간투자사업	울산 맑은환경㈜	147,214	49,470	19,005	21,179	408,960	’16.2.27. ~ ’36.2.26.
BTO	울산대교 및 접속도로 민간투자사업	울산 하버브릿지(주)	486,850	163,150				‘15.6.11~ ‘45.6.10. (30년)
BTO	약수 화물자동차 휴게소 조성 민간투자사업	SK주유소 (주)	19,900	19,900	-	-	-	‘18.1.1.~ ‘51.12.31
BTO	상개 화물자동차 휴게소 조성 민간투자사업	SK주유소 (주)	18,000	18,000	-	-	-	‘11.3.1.~ ‘46.2.28.

▸ 재정부담액 :

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

’06년 울산광역시 하수관로정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수관리과 김영달(☎229-3624)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 합류식 하수관로를 분류식화하여 지하수·방류수역의 오염방지와

하수처리장 처리 효율 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008. 1. ~ 2031. 1.(공사 2008. 1. ~ 2011. 1./ 운영 2011. 1. ~ 2031. 1.)

○ 위    치 : 동구 전역 및 북구 일원(양정·염포동)

○ 총사업비/민간사업자 : 94,237백만원 / 울산청천㈜

○ 사업규모 : 하수관 129.6km, 배수설비 11,288개소 정비 등

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 준공 후 20년간 관리운영권 설정, 시설임대료 5년 주기 수익률 조정

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	233,089	94,237	11,057	11,131	116,664
국 비	49,928	21,134	2,388	2,388	24,018
시 도 비	183,161	73,103	8,669	8,743	92,646
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(2011. 1. 21. ~ 2031. 1. 20.)

□ 향후계획

○ 2021. 1. 21. : 시설임대료 수익률 조정 예정(2차)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

’08년 울산광역시 하수관로정비

임대형 민자사업(BTL)

담당자

하수관리과 김영달(☎229-3624)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 합류식 하수관로를 분류식화하여 지하수·방류수역의 오염방지와

하수처리장 처리효율 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 9. ~ 2034. 3.(공사 2010. 9. ~ 2014. 3./ 운영 2014. 3. ~ 2034. 3.)

○ 위    치 : 울주군 언양·상북·삼남·삼동·온양읍 일원

○ 총사업비/민간사업자 : 90,531백만원 / 울주청천㈜

○ 사업규모 : 하수관 156.9km, 배수설비 7,515개소 정비 등

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 준공 후 20년간 관리운영권 설정, 시설임대료 5년 주기 수익률 조정

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	196,517	38,225	10,019	9,470	138,803
국 비	113,660	23,183	6,052	5,643	78,782
시 도 비	82,857	15,042	3,967	3,827	60,021
시군구비	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영 중(2014. 3. 3. ~ 2034. 3. 2.)

□ 향후계획

○ 2024. 3. 3. : 시설임대료 수익률 조정 예정(2차)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

울산박물관 건립

담당자

울산박물관 이정아 (☎229-4711)

□ 사업목적 및 필요성

○  울산의 문화재를 수집·보존·전시하고 교육·체험을 위한 문화시설 확보

□ 사업개요

○ 기    간 - 공사기간(25개월) : 2009. 1. 2. ~ 2011. 1. 31.

- 운영기간(20년)   : 2011. 2. 1. ~ 2031. 1. 31.

○ 위    치 : 울산광역시 남구 두왕로 277

○ 민간사업자 : ㈜울산박물관

○ 총사업비 : 47,252백만원

○ 사업규모 : 지하1층/지상2층, 1동, 연면적 14,408㎡, 부지면적 33,058㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 20년간 임대료 및 운영비 분할 지급

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	102,317	40,393	4,857	4,898	52,169
국 비	10,479	9,425	1,054	0	0
시 도 비	91,838	30,968	3,803	4,898	52,169

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 2031. 1. 31. : 협약종료 및 시설물 인수

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

자원회수시설

담당자

자원순환과

(☎ 229-3241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성암 소각장 증설 및 매립장 확장으로 위생적이고 안정적인 생활폐기물 처리

○ 매립폐기물 감량화, 소각열을 이용한 자원회수 및 온실가스 감축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009. 10. 15 ~ 2012. 10. 14.(36개월)

○ 위    치 : 울산 남구 처용로 524

○ 민간사업자 : 울산그린㈜

○ 총사업비 : 163,354백만원(국비 45,930, 민자 117,424)

○ 사업규모 : 매립장조성 158천㎡, 소각장건립 250톤/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건

- 운영기간 : 2012. 10. 15 ~ 2027. 10. 14(15년간)

- 운영범위 : 매립장운영(158천㎡) 및 소각장 운영(650톤/일)

- 사업추진 : BTO방식(시설 준공 후 15년간 관리운영권 설정)

※ 최소운영수익보장(MRG) : 없음

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	670,906	336,061	29,045	27.802	277,998
국 비	45,930	45,930
시 도 비	507,552	172,707	29,045	27,802	277,998
시군구비	0	0
기 타	117,424	117,424

□ 추진단계 : 운영중

○ 운영기간 중 생활폐기물 처리량에 따른 사용료 지급

- 2019년 사용료 101,383원/톤

- 기준사용료 : 소비자 물가지수 반영

□ 향후계획

○ 생활폐기물 자원회수시설 효율적 운영 및 감독

사업명

하수슬러지 민간투자사업

담당자

하수관리과 임정호(☎229-3292)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 효율적인 하수처리시설의 운영을 통해 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 위    치 : 남구 처용로 524

○ 시설용량 : 300톤/일(150톤/일×2기)

○ 사업기간 : 2006. 5. ~ 2026. 1.(공사 2006. 5. ~ 2011. 1./ 운영 2011. 1. ~ 2026. 1.)

○ 총사업비 : 26,051백만원(‘06년 1월 1일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 울산에스코㈜/한솔이엠이㈜ 외 2개사

※ 운영사 : 울산에스코㈜(운영기간 : 15년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 15년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	106,224	54,583	6,971	7,445	37,225
국 비
시 도 비	106,224	54,583	6,971	7,445	37,225
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2011. 1. 9. ~ 2026. 1. 8.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

굴화·강동 하수처리시설 민간투자사업

담당자

하수관리과 유태수(☎229-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수발생량 증가에 따른 하수처리장 신설로 처리구역 내 발생되는 하수의 완벽한 처리를 통해 방류수역의 수질개선

□ 사업개요

○ 위    치 : 울주군 범서읍 울밀로 2793-24, 북구 산하동 산음3길 32

○ 사업개요 : 47천㎥/일, 5천㎥/일, 하수관로 5.62km, 44.88km

○ 사업기간 : 2010. 3. ~ 2032. 9.(공사 2010. 3. ~ 2012. 9./ 운영 2012. 9. ~ 2032. 9.)

○ 총사업비 : 102,551백만원(‘06년 2월 28일 불변가격 기준)

○ 시행사/시공사 : 푸른울산㈜/롯데건설

※ 운영사 : 푸른울산㈜ (운영기간 : 20년)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 소비자물가지수변동분 산정, 20년간 운영

○ 지금까지 재정부담액 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	351,361	82,688	15,311	16,363	236,999
국 비
시 도 비	351,361	82,688	15,311	16,363	236,999
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2012. 9. 15. ~ 2032. 9. 14.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

농소하수처리장 민간투자사업

담당자

하수관리과 유태수(☎229-3293)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중구와 북구 농소지역의 급속한 개발로 인한 하수 발생량 급증으로

용연 및 방어진하수처리장의 처리용량 한계로 하수처리장 신설

□ 사업개요

○ 기     간 : 2009. 5. ~ 2016. 2.(공사 2009. 5. ~ 2016. 2./ 운영 2016. 2. ~ 2036. 2.)

○ 위      치 : 북구 시례새터길 190

○ 민간사업자 : 울산맑은환경㈜/롯데건설 외 5개사

○ 총사업비 : 147,214백만원(‘09년 3월 1일 불변가격 기준)

○ 사업규모 : 100천㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 시설운영 20년간

○ 지금까지 재정부담액(사용료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	498,614	49,470	19,005	21,179	408,960
국 비
시 도 비	498,614	49,470	19,005	21,179	408,960
시군구비
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중(2016. 2. 27. ~ 2036. 2. 26.)

□ 향후계획

○ 매월 사용료 지급

사업명

울산대교 및 접속도로 민간투자사업

담당자

건설도로과 박근철

(☎229-7651)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산시 남구와 동구를 연결하는 광역교통축 신설로 산업경쟁력 강화

및 교통체증 해소

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 5. 31. ~ 2015. 5. 30.

○ 위    치 : 울산광역시 남구 매암동(북구 아산로) ~ 동구 일산동

○ 민간사업자 : 울산하버브릿지(주)

○ 총사업비 : 486,850백만원

○ 사업규모 : 도로개설 L=8.35㎞(본선 5.59, 연결로 2.76), 현수교 1.15㎞, 2~4차로

□ 재정부담 현황

○ 실시협약 : 민자도로 30년간 운영권 보장(‘15. 6. 11. ~ ’45. 6. 10.)

○ 재정부담액 163,150백만원(공사비 128,850, 보상비 34,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	163,150	163,150
국 비	64,425	64,425
시 도 비	98,725	98,725
시군구비
기 타

□ 추진단계(운영 중)

○ ‘15. 6. 11. ~ ’45. 6. 10. : 민자도로 30년간 운영

사업명

약수 화물자동차 휴게소 조성 민간투자사업

담당자

물류해양진흥과 류은주(☎229-4112)

□ 사업목적 및 필요성

○ BTO(Build-Transfer-Operate) 민간투자사업을 통하여 창의적이고 효율적인 국도변 화물자동차 휴게소의 건설‧운영을 도모

○ 지역 물류 거점시설 확충과 화물자동차 운수종사자의 복리증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘18.1.1.~’51.12.31.(34년)

○ 위    치 : 울산광역시 북구 신천동 618번지 일원

○ 민간사업자 : SK에너지(주)

○ 총사업비 : 19,900백만원

○ 사업규모 : 부지 41,915㎡, 건축 3,877.7㎡(3층, 연면적 6,068.76㎡)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 실소득으로 자체운영(BTO 사업)

○ 지금까지 재정부담액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	19,900	19,900	-	-	-
국 비	2,800	2,800	-	-	-
시 도 비	4,000	4,000	-	-	-
시군구비	-	-
기 타	13,100	13,100	-	-	-

□ 추진단계(운영 중)

○ 화물자동차 휴게소 전문 운영법인 내트럭(주)에 시설물 전체 임대

○ 휴게소, 화물운송 주선점, 주유소, 세차장, 정비소검사장 등

□ 향후계획

○ ‘20. 12. : 2021년 화물차휴게소 유지관리 및 운영계획 승인

사업명

상개 화물자동차 휴게소 조성 민간투자사업

담당자

물류해양진흥과 류은주(☎229-4112)

□ 사업목적 및 필요성

○ BTO(Build-Transfer-Operate) 민간투자사업을 통하여 창의적이고 효율적인 국도변 화물자동차 휴게소의 건설‧운영을 도모

○ 지역 물류 거점시설 확충과 화물자동차 운수종사자의 복리증진에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘11.3.1.~’46.2.28.(35년)

○ 위    치 : 울산광역시 북구 산업로 1515

○ 민간사업자 : SK에너지(주)

○ 총사업비 : 18,000백만원(국비4,900, 시비1,700, 민자11,400)

○ 사업규모 : 부지면적 41,915.30㎡, 건축면적 3,877.70㎡(건축연면적 6,068.76㎡)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건 : 실소득으로 자체운영(BTO 사업)

○ 지금까지 재정부담액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	18,000	18,000	-	-	-
국 비	4,900	4,900	-	-	-
시 도 비	1,700	1,700	-	-	-
시군구비	-	-
기 타	11,400	11,400	-	-	-

□ 추진단계(운영 중)

○ 화물자동차 휴게소 전문 운영법인 내트럭(주)에 시설물 전체 임대

○ 휴게동, 주차장, 주유소, 정비·세차장 등

□ 향후계획

○ ‘20. 12. : 2021년 화물차휴게소 유지관리 및 운영계획 승인